문서번호	방재시설부-5578
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	★방재시설부장
임봉규		신용우	04/27 임춘근
협조	광역도로과장		진재섭
	주무관		이한규

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사(조경)

감리사 실정내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

〔방재시설부〕

『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』

감리사 실정내용 검토보고

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 관련, 보도신설구간 가로수식재

(구로구 요청사항)등에 대한 감리사 실정보고 검토결과임.

Ⅰ		관련문서

○ 남부감 제15-103(2015.04.21)호

⇒ 조경공사 실정보고(구로구청 요청사항)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

○ 위    치 : 구로구 개봉동 198-1일대(개봉역앞 남부순환로)

○ 규    모 : 지하차도설치 - 폭4차로  연장 736m

남.북측 측도 - 폭2~3차로 연장 2,280m

○ 공사기간 : 2007.09.10 ~ 2015.06.30.

○ 도 급 액 : 45,946백만원 (조경786백만원)

○ 시 공 사 : (주)케이에스씨건설(60%), 대우조선해양건설(주)(40%)

○ 감 리 사 : (주)동명기술공단, (주)동일기술공사

○ 조경공사

- 수목식재 : 교목 ~ 은행나무외 4종125주, 관목 ~ 회양목외 5종51,250주

- 수목이식 : 교목 ~ 소나무외 15종 343주, 관목 ~ 철쭉외 17종6,250주

Ⅲ		실정내용 및 검토결과

구 분	실정보고(감리)	검토결과	비 고
수목 식재등	◦ 공사 종점부 보도신설 구간 가로수 (왕벚나무B12) 식재 (하부식재포함) ◦ 공사 시점부 교통섬 녹지면적 감소 (U턴 차로 설치), 옹벽측면 관목 식재	◦ 개봉역~광복교 구간 보도신설에 따른 가로수 식재(구로구 요청사항), 시점부 교통섬 녹지면적 감소, 옹벽 측면 관 목식재등 구로구 요청사항에 대하여 긍정 검토.

Ⅳ		물량 및 공사비

□ 물량변경내역(전체분)

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증▽감	비고
	주요 내용	금액	주요 내용	금액
식재	- 왕벚나무(H4.0×B12) 41주 - 왕벚나무(H4.5×B15) 27주 - 산수유(H3.0×R12) 6주 - 소나무(H9.0×R35) 12주 - 소나무(H9.5×R40) 12주 둥근소나무(H1.5×W2.0) 28주 공작단풍(H2.0×R2) 13주 - 회양목(H0.3×W0.3)13,714주 - 황매화(H1.0×W0.4) 1,540주 - 산철쭉(H0.3×W0.3) 23,750주 - 자산홍(H0.3×W0.3) 21,150주 - 조팝나무(H0.6×W0.3) 2,380주 - 영산홍(H0.3×W0.3) 1,070주 - 화살나무(H0.8×W0.3) 2,462주 - 개나리(H0.6×3가지) 1,650주 - 사철나무(H1.2×W0.5) 420주 - 맥문동(3-5분얼) 10,550본 - 부용(10cm)16,630본 - 담쟁이(8cm) 20본	434,015	- 왕벚나무(H4.0×B12) 98주 - 왕벚나무(H4.5×B15) 27주 - 산수유(H3.0×R12) 6주 - 소나무(H9.0×R35) 12주 - 소나무(H9.5×R40) 12주 둥근소나무(H1.5×W2.0) 28주 공작단풍(H2.0×R2) 13주 - 회양목(H0.3×W0.3)15,860주 - 황매화(H1.0×W0.4) 1,540주 - 산철쭉(H0.3×W0.3) 23,450주 - 자산홍(H0.3×W0.3) 22,470주 - 조팝나무(H0.6×W0.3) 4,780주 - 영산홍(H0.3×W0.3) 1,070주 - 화살나무(H0.8×W0.3) 2,910주 - 개나리(H0.6×3가지) 1,650주 - 사철나무(H1.2×W0.5) 420주 - 맥문동(3-5분얼) 10,550본 - 부용(10cm)16,630본 - 담쟁이(8cm) 20본 - 줄사철(8cm) 925본	480,626	46,611
시설물	- 조경유용석(3-4목) 279.4t - 가로수분(1200*1200) 41조 - 우드칲포설(T3cm) 3,445.5 ㎡ - 지주목 139개	51,870	- 조경유용석(3-4목) 279.4t - 우드칲포설(T3cm) 3,445.5 ㎡ - 와이어로프 185m - 지주목 139개	41,024	- 10,846
수목이식	5,448주	138,163	5,448주	138,163	0	기 이식 완료

※세부사항 – 내역서 참조

□ 공사비 증감내역

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	624,049	659,814	35,764
제 경 비	191,678	201,508	9,831
도 급 액	815,727	861,322	증 45,595	부가세포함

(단위 : 천원)

Ⅴ		검토의견

○ 감리 실정내용과 같이 개봉역 ~ 광복교 구간 보도신설에 따른 가로수 식재 및

구로구 요청사항을 반영하여 승인하고 변경내역을 설계변경에 반영코자 함.

○ 신규단가는 협의율 적용

계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를

기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액     의 100분의50으로 한다.(공사계약일반조건 제20조 제1항).

붙  임 : 내역서 1부. 끝.