문서번호	도시철도토목부-5329
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		김성호	04/28 한동근
협 조
	주무관			황왕연

『지하철9호선 2단계 917공구 건설공사 폐기물처리용역』

총괄4회 및 5차1회 설계변경(정산) 검토보고

2015. 04

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 2단계 917공구 건설공사 폐기물처리용역』

총괄4회 및 5차1회 설계변경(정산) 검토보고

지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사 폐기물 처리용역과 관련 폐기물 처리 물량 정산으로 인한 설계변경에 대하여 검토 보고 드림

Ⅰ		공사 개요

○ 용 역 명 : 지하철 9호선2단계 917공구 건설공사 폐기물처리용역

○ 계약금액 : 246,489천원

○ 계약기간 : ‘08. 11. 05 ~ ‘15. 04. 30

○ 계 약 자 : ㈜지솔알이에이치  대표이사 유재원

○ 폐기물 준공 및 발주현황                               (단위 : 원)

구분	총괄	준공(1~4차)	5차	비고
용역기간	‘08.11.5 ~’15.04.30	‘08.11.5 ~14.12.30	‘15.01.08 ~’15.04.30
용역비	246,489,000	181,000,000	65,489,000

Ⅱ		계약금액 조정 및 물량정산 현황

○ 관련근거

- 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙 제8조(건설폐기물의 적절한 처리비용의 반영)

- 계약예규(공사계약일반조거 제23조의 3(건설폐기물량의 초과발생에 따른 계약금액의 조정)

○ 계약금액 조정 현황

(단위 : 천원)

구분	당초	변경	증감	비고
총괄	246,489	246,489	변경없음
5차	65,489	65,489	변경없음

○ 폐기물 물량 정산현황

(단위 : 원, ton)

구 분	당초		변경		증감		비고
	총괄	5차	총괄	5차	총괄	5차
계	18,746	4,883	18,892	5,029	146	146
폐아스콘	9,523	2,871	8,304	1,652	-1,219	-1,219
폐콘크리트	9,182	1,971	10,570	3,359	1,388	1,388
혼합폐기물	41	41	18	18	-23	-23

○폐기물 물량정산에 대한 분담현황(5차)

(단위 : 천원, ton)

구 분		계			발 주 처			시 공 사
		당초	변경	증감	당초	변경	증감	당초	변경	증감
폐콘크리트	소 계	1,971	3,359	1,388	1,306	2,537	1,231	665	822	157
	지하수 전용관로	19	222	203	19	222	203
	남문주변 환경개선	859	1,711	852	390	1,085	695	469	626	157
	930정거장 원상복구		167	167		167	167
	건축 폐기물	516	682	166	516	682	166
	본선 및 2-Arch터널	577	577	-	381	381		196	196
폐아스콘	소 계	2,871	1,652	-1,219	2,871	1,652	-1,219
	지하수 전용관로	513	342	-171	513	342	-171
	남문주변 환경개선	1,807	759	-1,048	1,807	759	-1,048
	올림픽로 원상복구	551	551	-	551	551
혼합폐기물	건축 폐기물	41	18	-23	41	18	-23
합 계		4,883	5,029	146	4,218	4,207	-11	665	822	157
금 액		65,489	65,489	-	57,089	55,089	-2,000	8,400	10,400	2,000

○ 폐기물 물량정산 사유

- 폐아스콘

‣ 지하수 전용관로 실 반출물량으로 정산(설계:513톤 → 실반출:242톤)

‣ 남문주차장 환경개선 주차장 원상복구 방법변경

․당 초 : 아스콘 재포장(t=25cm)

․변 경 : 표층 절삭 후 포장(t=10cm)

- 폐콘크리트

‣남문주차장 환경개선 주차장 원상복구 두께 증가(t=15cm→30cm)

‣탄천 둔치 주차장 수량 누락 및 호안블럭 수량산출오류(수량 126톤)

‣건 축 : 2호선 종합운동장 물량 증가(당초 516톤 → 변경 682톤)

‣아시아공원 쉼터 철거수량 누락 반영(누락수량 167톤)

- 혼합폐기물(건축)

‣실 반출물량으로 정산(2호선 개보수 및 9호선 종합운동장)

Ⅲ		책임감리원 검토의견

○ 도로복구(차도, 보도) 및 지하수 전용관로 설치 등의 사유로 폐기물 물량이 변동된 실처리한 사항으로 정산 설계변경하여 공사기간 연장없이 준공기한내에 총괄 및 5차용역을 준공 처리함이 타당함

○ 현장사무실 부지 폐기물물량 및 라이닝콘크리트 타설시 배관 잉여물량에 대한 처리비용은 시공사 부담으로 계약금액 조정시 감액 조치함이 타당함

Ⅵ		조치 의견

○ 책임감리원 검토의견과 같이 폐기물 물량에 대하여 실제 처리한 대로 정산 설계변경하여 준공처리코자 하며,

○ 시공사의 귀책으로 인해 발생한 폐기물에 대해서는 향후 공사 계약금액 조정시 감액(10,400천원) 조치코자 함.

○ 폐기물처리용역 설계변경 현황

구분		당초	변경	증감
총괄	계약금액	246,489,000	246,489,000	변경없음
	공사기간	‘08.11.05 ~‘15.04.30	‘08.11.05 ~‘15.04.30	변경없음
5차1회	계약금액	65,489,000	65,489,000	변경없음
	공사기간	‘15.01.08 ~’15.04.30	‘15.01.08 ~’15.04.30	변경없음

붙 임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(총괄4회 및 5차1회)