문서번호	토목부-8710
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상근		이동훈	04/28 노우성
협조

토목감리원 투입기간 연장에 대한 검토보고

「서남권 돔야구장주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

토목감리원 투입기간 연장에 대한 검토보고

「서남권 돔야구장주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사」

시설공사 준공기한 연장에 따른 토목부분 보조감리원 1명의 투입기간을 연장하여 감리업무의 공백을 최소화하기 위한 보고임

※ 감리용역비 : 증 29,904천원(당초 17.9개월 → 변경 20개월, 증 2.1개월)

1		관련근거

▢ 삼보 2015-412(‘15. 4.17.) : 보조감리원(토목) 투입기간 연장 승인 요청

2		용역개요

▢ 용 역 명 : 「서남권 돔야구장주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사

전면책임감리용역」

▢ 공사규모

○ 보행광장 설치(B=28.3m, L=150m)

○ 연결로 및 경사로 5개소(B=5~8m, L=333m, A=830.4㎡)

○ 교량확장(B=37.5m → 52.5m, L=203m)

▢ 용역기간 : 2013. 1. 3. ~ 2015. 6.30.

▢ 용 역 비 : 금1,981백만원

▢ 감 리 사 : ㈜삼보기술단외 2개사

3		감리단 보고 내용

▢ 토목부분 보조감리원의 투입 기한이 당초 2015.04.27.까지 계획되었으나 공사 준공기한이 연기(2015.2.28.→2015.6.30.)됨에 따라 검측업무 및 공사 준공 등 감리업무 수행을 위하여 투입기간 2.1개월 연장이 필요한 실정임

▢ 토목감리원 투입기간 변경계획(안)

성 명	등 급	투 입 기 간		추가금액	비 고
		당 초	변 경
이 경 균	감 리 사	‘13.11. 1. ~‘15. 4. 27.	‘13.11. 1. ~‘15. 6.30.	29,904천원	증 2.1개월

4		조치의견

▢ 공사에 대한 감리업무의 공백이 없도록 공사 준공기한인 ‘15. 6.30.까지 토목감리원 투입기간을 2.1개월 연장하여 승인코자 함.

붙 임 : 보조감리원(토목) 투입기간 연장 승인 요청 공문 1부.  끝.