문서번호	원무과-6637
결재일자	2015.4.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
이지영	조선행	김종환		04/28 나백주
협 조
	서무팀장		한홍재

서북병원 전관방송설비 교체계획

2015. 4.

서북병원

원무과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서북병원 전관방송설비 교체계획

우리병원 화재 발생시 화재수신반과 연동하여 정해진 싸이렌 및 대피 안내방송을 자동 송출하는 전관방송설비를 정비하여 화재 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진배경

□ 청사 개원시 설치된 전관방송설비 노후로 잦은 고장 및 음질     저하 현상이 발생하고,

□ 화재수신반과 연동회로 오동작으로 화재 발생시 신속한 조     치에 어려움이 있어 교체를 추진하기로 함.

2		방송설비 현황

설치장소	설치수량	설치년도	비고
방재센터	4조(랙 타입)	2004년
대회의실/중회의실	2조/1조(랙 타입)	2004년
동관,본관,서관 (천장스피커)	705EA	2004년
동관,본관 (벽부스피커)	15EA	2004년
지하주차장 (기둥스피커)	10EA	2004년
지상주차장 (옥외스피커)	28EA	2004년

○ 사진현황

방재센터 방송설비	대회의실 방송설비

중회의실 방송설비	천장스피커

3		사업개요

□ 사 업 명 : 서북병원 전관방송설비 교체계획

□ 사업기간 : 2015년 5월 ~ 7월

□ 정비내용

○ 방송설비 정비(랙 타입 6조)

- 방송설비(무선마이크, 무선수신기, 회의용마이크 등),                전동스크린, 디지털믹서, 모니터, 무정전전원장치 등

○ 천장스피커 690EA(예비20EA 포함), 벽부스피커 15EA

○ 기둥스피커 10EA, 옥외스피커 28EA

□ 소요예산 : 145,238,670원

○ 관급비(방송설비) : 133,508,670원(조달수수료 포함)

○ 도급비           :  11,730,000원

○ 예산과목 : 서북병원 청사시설 운영관리, 시설비(100-401-01)

4		계약방법

□ 방송설비 구매 : 조달구매(조달우수)

○ 조달청 지정 우수업체 : IMP 대표 정혜영

○ 조달 우수 지정번호 : 제2011152호

□ 설치공사 : 수의계약

○ 계약업체 : ㈜오성에스이엠 대표 오성표 ☎************

서울시 노원구 노원로15길 10, A동-401호

(하계동, 하계테크노타운)

○ 근   거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령

제25조 제1항 제5호 의한 소액 수의계약

5		추진일정

□ 2015. 5. : 구매 발주

□ 2015. 5. ~ 8. : 설치 및 준공.

붙임 : 1. 내역서(방송설비 구매) 1부.

2. 견적서(방송공사) 1부.

3. 설치장소 평면도 1부. 끝.