문서번호	급수운영과-10056
결재일자	2015.4.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		소장
권영안	김태형	최명익		04/28 代이만기
협 조

『중곡동589-9~181-14호간송배수관정비공사-시험시공』

준공기한 연기보고

2015.04

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

『중곡동589-9~181-14호간송배수관정비공사-시험시공』

준공기한 연기보고

우리사업소에서 발주하여 시설관리공단에서 감독중인 아래 공사에 대하여 준공기한 연기사유가 발생되어 보고 드림.

1		관련근거

○ 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처-4190호(2015.04.27.)

(“준공기한 연기보고서 제출”)

2		공사현황

○ 공 사 명 : 중곡동589-9~181-14호간 송배수관 정비공사(비굴착갱생-시험시공)

○ 공사기간 : 2014. 11. 25 ~ 2015. 04. 30

○ 도 급 액 : 206,224,500원

○ 공사개요 : D=1,000mm, L=40m

○ 도 급 자 : 청파건설 대표 김종개

3		보고내용

○ 공정율 : 95%(‘15.04.27 현재)

- 공사완료 : D=1000mm,L=40m

○ 잔여 공정

- 현장 경화관(PE라이너) 품질시험(물리적 특성 시험 및 위생안전 기준시험)

○ 준공기한 연기 사유

- 현장 경화관(PE라이너)에 대한 품질시험(물리적 특성 시험 및 위생안전 기준시험) 결과가 공사기간 내 통보가 불가함.

○ 준공기한 연기일수 산정 내용(연기일수 합계 : 31일)

- 품질시험기간 : 24일

- 품질시험 결과보고 기간 : 7일

※품질시험 소요기간 : 45일 (2015.04.09.~ 2015.05.24)

○ 준공기한 연기 현황

- 당 초 : 2014.11.25. ~ 2015.04.30

- 변 경 : 2014.11.25. ~ 2015.05.31(31일 연기)

○ 귀책사유 : 동부수도사업소

○ 지체상금 : 미부과

4		조치의견

○ 상기사항에 의거 감독청(시설관리공단)에서 제출한 준공기한 연기요청건은 적정(타당)함으로 공사 준공기한을 연기하여 공사진행에 만전을 기하고자 하며, 공사기간 변경 계약을 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 :  1. 감독청(시설공단) 연기검토 공문 및 보고서 각1부

2. 시공사 연기의뢰 관련 서류 1부.끝.