함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	도로점용공사 일정변경으로 인한 공사일정통보

1. 교통운영과-8817(2014.5.13.) 『교통소통대책 자문회의 최종결과 통보(2014년도 제7차)』호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 당초 교통소통자문회의 결과에 따라 2014년 공사시행하려 하였으나, 공사 미시행(2구간)으로 인한 2015년 공사일정을 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 쌍문동 707-13~631-2 세척갱생관 정비공사외 1건

나. 대상도로 : 도봉로

다. 점용기간 : 2구간 - 당초 : 2014.8.25.~9.3(10일)

- 변경 : 2015.5.26.~6.08(10일)

라. 변경사유 : 2014년 공사 미시행으로 인한 공사연기

마. 점용시간 : 야간(23~06시)

바. 담당부서 : 북부수도사업소 급수운영과

붙 임 : 1.자문회의 결과 1부.

2.위치도(2구간) 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	윤승구		급수운영과장	전결 04/28 代이승완
협조자	주무관	최용진
시행	급수운영과-7412	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 377	/
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	yseong9@seoul.go.kr	/	대시민공개