문서번호	급수운영과-7432
결재일자	2015.4.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
이정훈		최임봉	04/28 정경효
협 조

설계변경(4차) 시행보고 (2014년 강남,서초구 관내 포장도로굴착복구공사)

2015년  4월

강남수도사업소

급수운영과

설계변경(4차) 시행보고

우리사업소가 시행하는 「2014년 강남,서초구 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)」에 대하여, 본부 심사결과를 다음과 같이 보고하고 설계변경(4차)을 시행하고자 합니다.

□  공사 현황

□ 공 사 명 : 2014년 강남 서초구 관내 포장도로굴착복구공사

□ 공사개요 : 아스콘포장 71.71a, 보도블록포장 6.28a

□ 계약기간 : 2014. 4. 18 ~ 2015. 4. 30

□ 계약금액 : 793,547,700원

□ 계 약 자 : 한미이앤씨(주)  대표 윤지연

□ 예산과목

- 상수도사업비,영업비용,급수공사비,신설공사비

- 상수도사업비,영업비용,급수공사비,개조공사비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축,소방용수시설 등의

설치 및 관리,일반회계,소방용수시설설치,시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축,소방용수시설 등의

설치 및 관리,일반회계,소방용수시설보수,시설비

□  본부 심사결과

❍ 심사 요청 : [2015년 상수도사업 설계심사 추진계획(재무회계과-1085)]에

의거 도급비 10%미만 증액사항은 본부 재무회계과 심사대상임

❍ 심사 결과

- 관련 대호 : 재무회계과-5383(2015.4.28.)

- 도급비 조정

심사요청 금액	심사조정 금액	증 감
860,312,200원 (증8.4%)	857,923,000원 (증8.1%)	감)2,389,200원

❍ 주요공정별 심사결과

구 분	검토 및 심의 내용	심의 결과
토공	아스팔트 포장절단(100~150mm적용) 등 24종	1개 공정 물량변경
포장공	보조기층공(t=10cm,10㎡이상) 등 48종	이상없음
부대공	소형공사안내간판 설치,철거 등 19종	2개 공정 물량변경
사급자재비	보조기층재(75mm이하) 등 12종	이상없음
제잡비	제잡비의 요율 적용여부	이상없음

- 토공 : 잔토처리(굴삭기 0.4) 물량변경

- 부대공 : 안전시설 재료비 손료 및 조면시설 제작 손료 물량변경

□  설계변경 보고

❍ 계약금액(도급비) 변경 (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
계약금액	793,547,700	857,923,000	증)64,375,300

□ 포장물량 증․감 현황 (단위 : a)

구 분	당 초	변 경	증 감
계	77.99	108.43	증) 30.44
아스팔트 포장	71.71	99.71	증) 28.00
보도블록 포장	6.28	8.72	증) 2.44

※ 포장물량 증가 사유

- 봉은,삼성배수지 통수관련 겨울철 긴급공사 : 아스팔트 12.27a

- 강남구 구룡마을 전용 소방관로 부설공사 : 아스팔트 7.99a

□ 조치 의견

상기 보고내용에 의거 본부 심사결과에 따라 설계변경(4차)을 시행하고 본청 재무과에 계약변경 의뢰하고자 합니다.

붙임 문서 : 계약금액 조정 결과 통보 및 설계변경(4차) 내역서 1부.  끝.