문서번호	급수운영과-10015
결재일자	2015.4.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	소장
최호림	김태형	최명익	04/28 代이만기

동일로 송배수관정비공사 외 3건 교통소통대책 수립용역 용역기간 연기보고

2015.04.

동부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동일로 송배수관정비공사 외 3건 교통소통대책 수립용역

용역기간 연기보고

우리사업소에서 시행중인『동일로 송배수관정비공사 외 3건 교통소통대책 수립용역』에 대하여 용역기간 연기사유가 발생되어 보고함.

Ⅰ		용역현황

○ 용 역 명 : 동일로 송배수관정비공사 외 3건 교통소통대책 수립용역

○ 용역기간 : 2015.03.20. ~ 2015.04.28.

○ 도 급 자 : ************

○ 도급금액 : ***********

Ⅱ		추진현황

○ 계약완료 후 착수일부터 30여일 동안 교통현황 및 분석, 보고서 작성 등 추진

○ 서울시 교통소통대책 자문회의 심의요청 : 2015.04.08.(수)

○ 2015년 제7차 도로점용공사장 교통소통대책 사전검토결과 통보 및 자문회의         개최 알림 : 2015.04.20.(월)

○ 2015년 제7차 자문회의 개최

- 장소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

- 일시 : 2015.04.23.(목) 15:00

○ 2015년 제7차 자문회의 결과 알림

- 자문회의 결과 : 조건부 시행(의결사항 반영 후 보완서작성 제출요함)

Ⅲ		보고내용

○ 진행상황

- 2015.04.23.(목) 자문회의 참석 및 보고 완료하였으나 조건부 시행에            따른 보완서 작성이 필요함.

- 의결사항 반영 후 보완서 작성 및 제출일정에 따라 자문회의 최종결과는           용역기간 기한(2015.04.28.(화))이 지난 후 통보 될 것으로 판단됨.

○ 연기사유

- 진행상황과 같이 교통소통대책 자문회의는 준공기한 내 실시하였으나,           최종결과 통보가 용역기간 기한을 초과하므로 연기코자 함.

- 관련근거

· 과업지시서 - Ⅲ.과업수행 지침 - 1.일반지침 - 가.일반사항 : 기타 과업과             관련하여 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되는 경우 과업기간을 변경할 수 있다.

· 용역시행방침서상 용역기간 명시 : 단, 교통처리심의위원회 통과 시 까지              연장 할 수 있음.

○ 용역기간 연기

- 당초 : 2015.03.20. ~ 2015.04.28.

- 변경 : 2015.03.20. ~ 2015.05.19.

※ 자문회의 최종결과는 통상 자문회의 날로부터 3주이내 소요됨.

○ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 용역기간을 연기하여 용역수행에 만전을 기하         고자 하며, 우리사업소 계약부서에 변경계약 의뢰코자 합니다.  끝.