문서번호	도시철도계획부-3686
결재일자	2015.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	경전철설계과장	도시철도계획부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
박준우	조성만	박상돈	김준기		04/29 천석현
협 조
	주무관			김형건

신림선 경전철 민간투자사업

실시설계단계 건설사업관리용역 발주계획

2015. 4.

서울특별시 도시기반시설본부

(도시철도계획부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신림선 경전철 민간투자사업

실시설계단계 건설사업관리용역 발주계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

신림선 경전철 민간투자사업의 실시설계단계 건설사업관리용역 발주계획을 수립하여 보고합니다.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 실시설계단계 건설사업관리용역

○ 과업규모 :

- 구 간 : 여의도 ～ 대방역 ～ 보라매역 ～ 신림역 ～ 관악산입구 주차장

- 연 장 : 연장 8.06km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

○ 과업내용

- 실시설계단계 건설사업관리용역(토목(궤도), 건축, 기계, 전기, 신호, 통신, 검수, 소방)

- 설계의 경제성 검토 등

○ 용역기간 : 착수일로부터 120일(4개월)

○ 소요예산 : 779,635천원

※ 예산(건설보조금) : 650,000천원 (‘07.3. 불변가)

Ⅱ		발주사유

○ 신림선 경전철 민간투자사업의 실시설계단계 건설사업관리업체는 사업시행자가 선정하여 통보(남서울2012-106호, 2012.11.30.)한 바 있으나,

○ 재협상에 따른 실시협약(안) 제37조에 의거 사업시행자가 실시설계단계 건설사업관리업체의 재선정을 요청(남서울2015-4호, 2015.4.17.)하고 있고,

○ 설계의 적정성 및 안전성 등 설계의 부실을 방지하고, 내실있는 설계로 품질을 확보코자 발주계획을 수립함

Ⅲ		발주계획

○ 입찰방법 : 일반경쟁

-  수행실적평가(PQ) 후 가격입찰

○ 입찰참가자격

- 토 목 : 엔지니어링산업 진흥법 제21조의 규정에 의하여 건설부문의 철도, 토목구조, 토질 및 기초 전문분야를 엔지니어링사업자로 산업통상자원부장관에게 신고한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의하여 철도, 토목구조, 토질 및 기초 분야의 기술사사무소 혹은 합동기술사사무소로 등록된 업체

- 건 축 : 건축사법 제23조에 의한 건축사사무소를 개설하고 국토교통부 장관에게 신고를 필한 업체

- 기 계 : 엔지니어링산업 진흥법 제21조의 규정에 의하여 설비부문의 설비전문분야를 엔지니어링사업자로 신고한 업체, 또는 기술사법 제6조에 따른 기계분야의 공조냉동기계 또는 건설분야의 건축기계설비 기술사사무소로 등록된 업체

- 전 기 : 전력기술관리법 제14조에 의한 종합설계업 또는 전문설계업 1종으로 등록된 업체, 또는 기술사법 제6조의 규정에 의하여 건설부문(건축전기설비), 전기․전자부문(발송배전, 전기응용, 전기철도) 기술사사무소로 등록된 업체

- 신 호 : 전력기술관리법 제14조에 의한 종합설계업 또는 전문설계업 1종으로 등록하고 해당 철도신호기술자를 보유한 업체

- 통 신 : 엔지니어링산업 진흥법 제21조 규정에 의해 정보통신부문의 정보통신 전문분야를 엔지니어링사업자로 신고한 업체 또는 기술사법 제6조에 따라 통신정보처리분야의 정보통신 기술범위 기술사사무소로 등록한 업체

- 검 수 : 엔지니어링산업 진흥법 제21조 규정에 의해 기계부문 일반산업기계 또는 차량 전문분야로 신고한 업체, 또는 기술사법 제6조에 따라 기계분야의 산업기계설비 또는 차량기술범위로 기술사사무소를 등록한 업체

- 소 방 : 소방시설공사업법 제4조에 따른 전문소방시설설계업을 등록을 필한 업체

○ 공동계약 이행방식

- 공동도급[공동이행, 분담이행, 혼합방식(공동이행+분담이행)]으로 중복참여 가능함.

- 토목분야는 공동이행 방식으로 하고, 토목 이외 분야는 분담이행 방식으로 함.

- 공동수급체 구성원 수는 대표사를 포함하여 15개사 이내로 하고, 토목분야(공동이행방식)의 구성원별 최소 지분율은 5%이상이어야 한다. 다만, 분담이행방식의 공동수급체 지분율은  과업내용별 용역참여비율(분담비율)과 동일하여야 함

- 공동수급체 대표자는 토목분야 출자비율이 큰 업체로 선임

- 과업내용별 용역참여비율(분담비율)

계 (%)	토 목	건 축	기 계	전 기	신호	통신	검수	소방
100.0	55.7	10.6	13.9	3.9	2.7	5.9	5.6	1.7

○ 입찰참가적격자 선정 및 낙찰

- 입찰참가적격자 선정

· 입찰참가 적격자는 실시설계단계 건설사업관리용역에 참가하고자 하는 자 중 수행실적평가 결과 90점 이상을 얻은 자를 말한다. 다만, 수행실적평가서 제출업체가 15인 미만인 경우에는 수행실적 평가점수가 60점 이상인 모든 업체에게 입찰참가자격을 부여하고, 90점 이상인 자가 15인 미만인 경우에도 수행실적 평가점수가 60점 이상인 자 중 득점순으로 15위까지 입찰참가자격 부여

- 낙찰자 결정

· 입찰참가적격자 중 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

※ 종합평점 산정 : 용역수행능력(45점)+지역업체참여도(3점)+경영상태(2점) +입찰가격(50점)+기술인력보유상황(△10)

Ⅳ		사업수행능력 평가기준

○ 평가방법 : 절대평가, 상대평가

- 기술심사담당관 : 수행실적평가팀(도철설계부, 도철건축부, 도철설비부) 구성 평가

○ 평가항목 및 배점

평 가 항 목		배점	세부평가항목(배점)	평가방법
참여기술자 (60점)	책임건설사업관리기술자	30	경력(19), 실적(9), 교육훈련(2)	절대
	분야별건설사업관리기술자	23	경력(15), 실적(7), 교육훈련(1)	절대
	면접발표	7	책임기술자(5), 분야별기술자(2)	상대
유사용역 수행실적		10	회사 유사용역 실적	절대
신용도		18	입찰참가제한(8), 벌점(6), 재정상태 건실도(4)	절대
기술개발 및 투자실적		12	개발활용실적(4), 투자실적(8)	절대
합 계		100
가점		0.2	공사비 절감기여 기술자	절대
감정		10	부패행위 관련자	절대

※ 사고업체 및 사고기술자는 서울시 도시기반시설본부가 운영하는 One-PMIS에 등재된 업체

○ 참여기술자 평가계획

- 평가대상 : 총 10(책임 건설사업관리기술자 1, 분야별 건설사업관리기술자 9)

․ 책임 건설사업관리기술자 : 철도기술사로 한정

․ 분야별 건설사업관리기술자 : 특급기술자로 한정(소방분야 미평가)

- 분야별 배분율

계	토 목			건축	기계	전기	신호	통신	검수
	철도	토목구조	토질및기초
100	25	15	10	15	15	5	5	5	5

○ 유사용역 수행실적의 적용

- 분야별 계수 : 도시철도·경전철·광역철도는 100%, 일반철도·고속철도는 80%

- 용역의 성격에 따른 계수 적용

․ 설계 및 시공단계를 포함한 건설사업관리용역실적 × 1.0

․ 설계단계의 건설사업관리용역실적 × 1.0

․ 설계용역(타당성조사, 기본계획, 기본설계, 실시설계) 실적 × 0.7

○ 기타사항 : 서울시 사업수행능력 평가세부기준 적용

Ⅴ		향후 추진일정

○ ‘15. 4. 24: 용역발주심의(서울시건설기술심의소위원회)

○ ‘15. 4. 24	: 기술용역 타당성 심사(본부↔기술심사담당관)

○ ‘15. 4. 24	: 사업수행능력평가 세부기준 협의(본부↔기술심사담당관)

※ 기술심사담당관 협의․심의사항을 반영하여 계약의뢰

○ ‘15. 5.  4	: 계약 의뢰(도철계획부→재무과)

○ ‘15. 5.  6	: 입찰공고(재무과)

○ ‘15. 5. 13	: 입찰참가신청(입찰참가업체→도철계획부)

○ ‘15. 5. 21	: 사업수행능력평가 완료 및 통보(도철계획부→재무과, 업체)

○ ‘15. 5. 22~26 : 입찰 및 개찰

○ ‘15. 5. 27	: 계약 및 설계감리 착수.  끝.