투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	경의선숲길 공원조성공사 설계변경(총차3회,1차3회) 시행 및 변경계약 의뢰

1. 방재시설부-13280(2014.12.15)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『경의선숲길 공원조성공사』와 관련하여 다음과 같이 설계

변경(총차3회, 1차3회 내역변경)코자 합니다.

가. 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사

나. 계약내역                                              (단위 : 원)

구 분	도 급 비	공사기간	비 고
총 차	11,812,020,000	2013.09.30 ~ 2016.03.31
1 차	7,356,800,000	2013.09.30 ~ 2015.04.30
2 차	4,455,220,000	2014.12.22 ~ 2016.03.31

다. 도 급 자 : 한일개발(주) & 우보건설(주)

라. 예산과목 : 생활권공원확충, 도심공원확충, 경의선숲길 공원조성,

시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경 내역                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총 차	11,812,020,000	11,812,020,000	0	물량변경
1 차	7,356,800,000	7,356,800,000	0	물량변경
2 차	4,455,220,000	4,455,220,000	0	변경없음

- 변경사유 : 공사 실정보고 승인사항 반영에 따른 물량변경

바. 준공기한 : 변경 없음

붙임  1. 설계변경 관련 보고서 1부.

2. 감리단 설계변경 검토보고 1부.

3. 변경설계 내역서(전체 3회, 1차 3회) 1부.

4. 합의각서 1부,  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김달용			공원시설과장					김인숙					방재시설부장					전결 04/29 임춘근
협조자				주무관						박계현					계약1팀장							김점선
시행			방재시설부-5727									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 14층															/
전화		3708-8731						/전송			3708-8756					/	kdyong4992@seoul.go.kr												/	대시민공개