문서번호	물재생과-2745
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		04/29 강병수
협조

제3처리장 종침 기계설비 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

중랑물재생센타

(물재생과)

제3처리장 종침 기계설비 정비

제3,4처리장 최종 침전지에서 가동중인 하수처리 기계설비 고장분에 대하여   기계설비 보수 연간단가 업체에 의뢰하여 신속히 정비함으로서 하수처리에 만전을 기하고자 함

정비 대상 설비 현황

위치	기기명	고장내용	수량	설치년도	비고
3처리장 C계열 종침	5지	사이폰관 점검(지배수 및 청소)	1식	1988년
3처리장 D계열 종침	3지	사이폰관 점검(지배수 및 청소)	1식	1988년
	5지	구동휠 파손	2개	2013.2.

고장원인

구동․종동휠 : 장시간 운전으로 인한 주행휠 축 및 베어링 파손

사이폰관 : 장시간 운전으로 사이폰관 막힘현상 발생

정비 계획

수처리보수공사(연간단가) 업체에 작업지시후 정비실시

- 정비기간 : 2015.5.01 ∼ 5. 14(14일간)

작업완료 보고후 정산조치

소요예산 : 약9,000천원.  끝.