	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 기한 연장요청건 심의회 개최 결과 보고(호영빌딩)

1. 예방과-6113(2015.04.28.)호「시정보완명령 기한 연장요청건 심의회 개최 계획(호영빌딩)과 관련입니다.」

2. 위와 관련 시정보완명령 기한 연장요청건에 대한 심의회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 심의위원회 개최

○ 일      시 : 2015. 04. 28(화) 11:00~11:30

○ 장      소 : 예방과장실

○ 대      상

대상	시정보완사항	연면적	층수	명령일	보완기한	비고
호영빌딩 *******	[시정보완사항 지적된 사항 11건] - 소화설비 5건 - 경보설비 2건 - 피난설비 2건 - 기타설비 2건	3,834 ㎡	5/1	2015. 03.31.	2015. 04.30

○ 위원회구성 : 6명(위원5, 간사1)

연번	위원구성	소 속	직 위	성 명	비고
1	위원장	예 방 과	예 방 과 장	박선호
2	위 원	소방행정과	장비회계팀장	김진홍
3	위 원	재난관리과	대응총괄팀장	정선웅
4	위 원	예 방 과	예 방 팀 장	이성희
5	위 원	예 방 과	위험물안전팀장	김인수
6	간 사	예 방 과	검사지도주임	박종숙

○ 심의안건 및 위원회 의결

-  심의안건 : 시정보완명령 보완기간 연장요청 사유에 대한 타당성

및 적법성 검토

-  위원회 의결 : 위원 과반수 참석 및 참석위원 과반수이상 찬성으로 의결

나. 심의결과

○ 상기 대상은 지하1층 화재발생 상가 관계자간의 수리비용문제 및

보험금지급지연, 폐기물처리법에 의한 내부공사 지연 등 의견조정이 곤란한 상태로 시정보완명령기한을 2015.05.31.까지 연장하기로 의결함.

붙임  1. 요약서 1부.

2. 심의표 1부.

3. 심의 위원회 의결서(총괄) 1부.  끝.

담당자	신대섭		검사지도팀장	代김인수		예방과장	박선호		★소방서장	04/29 백근흠
협조자	담당자	박종숙
시행	예방과-6256	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동 목동서로 180(목1동 919-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	fire1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)