문서번호	원무과-6668
결재일자	2015.4.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
김창수	조선행	代한홍재		04/29 나백주
협 조
	서무팀장		한홍재
	주무관		전설이

시설물 균열보수 등 검토보고

서울특별시 서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시설물 균열보수 등 검토보고

‘14년 하반기 건축물 안전점검 결과에 따라 청사내 시설보수를 시행하여 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사개요

시설물 現 상태

옥상 바닥줄눈 충진재 손상	옥상파라펫 균열	지하1층 벽체 균열

공 사 명 : 시설물 균열보수 등 보수공사

공사내용

❍ 본관 및 동관 옥상 바닥줄눈 코킹

- 주요공정 : 이물질 제거 등 바탕준비, 마스킹 테이프붙이기, 프라이머 바르기(표면 공극 매움), 실링제 시공

- 물    량 :  본관옥상(643m), 동관옥상(355m)

❍ 옥상 파라펫 균열보수 및 도장

- 주요공정 : 바탕면 정리(필요시 V커팅), 균열부위 실링제 주입, 도장작업

- 물    량 : 본관(330㎡)

❍ 지하1,2층 벽체균열 보수 및 도장

- 주요공정 : 바탕면 정리(필요시 V커팅), 균열부위 실링제 주입, 누수의심부분 발포우레탄 주입작업, 도장작업

- 물    량

․ 균열보수 : 지하1․2층 벽면 균열부위

․ 도장면적 : 333㎡

Ⅱ		시 행 방 법

사업기간 : 착공일로부터 20일

계약방법 : 1인 견적에 의한 수의계약

❍ 관련법령 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제25조 제1항 제5호 및 동법시행령 제30조 제1항에 의한 수의계약

계약업체 : **************

❍ 주    소 : ****************

소요예산 : 14,663천원

예산과목 : 서북병원청사시설운영관리, 공공운영비(201-02)

붙임 : 내역서 1부