문서번호	시설관리과-1131
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
강윤근		박희철	04/29 차광재
협 조
	주무관			김영후

『한강지천 횡단교량 3개소 설계용역』 착수 보고 회의결과

2015. 4

『한강지천 횡단교량 3개소 설계용역』 착수보고 회의 결과

1				사 업 개 요

○ 용역대상 : 한강지천 횡단교량 3개소

교량명	탄 천 교	안 양 천 교	중 랑 천 교
규 모	폭 6.8m, 연장 100m	폭 6.0m, 연장 200m	폭 4.0m, 연장 100m
용역방향	철거후 재설치	보수․보강 및 확장	보수․보강 및 확장
진단결과	내하력 부족 안전위험	시설물노후 및 교량협소	시설물노후 및 교량협소

○ 사업기간 : 2015. 03.25 ~ 2015. 09.20 (180일)

○ 사 업 비 : 131백만원

○ 계약업체 : (주)동일기술공사 대표 김수보

2				착수보고회의

○ 일     시 : 2015. 4. 24.(금) 16:00

○ 장     소 : 한강사업본부 2층 소회의실

○ 참 석 자

- 한강사업본부 : 시설부장, 치수과장, 시설관리과장외 2명

- 동일기술공사 : 사업책임기술자 전진웅 상무외 1명

○ 회의내용

- 과업대상 교량현황 분석

- 기존 한강지천교량 개선사업 분석

- 과업대상 교량별 추진방향 검토 및 의견 수렴

3				회 의 결 과

○ 탄천 신설교량

- 기존 한강지천교량 개선사업을 참고하여 침수시 유지관리, 자재관리, 홍수시 통수단면 확보, 미관, 경제성, 내구성 등을 충분히 검토하여 교량의 구조형식 설정

- 지정홍수위, 지배홍수위 뿐만 아니라 주변의 자전거로가 잠길 경우, 연결되는 자전거도로와 산책로의 구배, 보행동선 등 검토

○ 중랑천교

- 중랑천교는 폭(B=4.0m)이 좁고 상판 데크 및 안전난간 등이 노후 되었으므로 신설개념에 가까운 교량으로 거듭날 수 있도록 검토

○ 기  타

- 중랑천, 탄천, 안양천에 대한 최근의 하천관리계획 등 상위 계획 검토

- 교량 확장 사례 등을 비교 분석하여 적정한 공법 선정

- 한강공원 자전거도로(B=4.0m)와 산책로(B=2.0m) 폭을 감안하여 교량 폭 설정

4				향 후 계 획

○ 2015.04.27. ~ 05. 31 : 교량형식 및 교량확장방안(공법) 검토

○ 2015.06.01. ~ 07. 15 : 설계자문(1차) 교량형식 및 공법 결정

○ 2015.07.16. ~ 08. 15 : 실시설계 (관련기관의견 및 자문의견 반영)

○ 2015.08.16. ~ 09. 05 : 설계자문(2차) 세부설계의 적정성 검토

○ 2015.09.06. ~ 09. 10 : 성과품 작성전 사전검토 협의

붙임 : 착수보고 회의자료 1부.  끝.