문서번호	토목부-8822
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	04/29 노우성
협조

서원마을 민원사항 조치방안 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

서원마을 민원사항 조치방안 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

공사구간에 인접한 서원마을 주민들의 민원사항(수림대 성토외 3건)에 대하여 조치방안을 검토 보고하는 사항임

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2015. 6.30.

◦ 도 급 비 : 18,242백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

■ 현 황

◦ 위치도

◦ 서원마을은 구리암사대교 남단 암사 IC 인접한 곳에 위치

■ 요청사항

◦ 완충녹지 성토 높이 조정(2m 추가 성토)

◦ 마을인접구간 조경석 설치

◦ 자전거도로 조성구간 사면에 조경석 설치

◦ 조경석 앞 배수로 뚜껑(스틸그레이팅) 설치

■ 감리단 검토의견

○ 서원마을 완충녹지조성구간 보완요청 민원이 있어 발주처와 유지관리기관인 강동구청과 협의된 사항에 대해 아래와 같이 검토하여 보고함.

- 성토 높이 조정(2m 추가) : 현장 내 발생 유용토를 활용하여 조성 가능

- 조경석 쌓기 및 배수로뚜껑 설치

· 완충녹지가 마을도로에 근접하여 경사지게 조성되므로 주민의견을 반영하여  도로경계에서 약 4m정도 이격하여 사면 하단부에 조경석 및 수로에 뚜껑을 설치함으로써 높게 조성되는 사면에 대한 시각적 미관을 고려하고 강우 시 토사 유출로 인한 안정성 확보 가능

- 자전거도로와 7.5m도로 사이에 자연석 쌓기

· 주민의견을 반영 자연석 쌓기로 부지를 확보하여 그 공간에 수목식재 시자전거도로와 마을 주변이 친환경적으로 조성이 가능하여 쾌적한 공간제공

- 소요 공사비 : 약 33백만원

■ 조치 의견

○ 감리단 검토의견대로 시공토록 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 증) 33백만원

붙  임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.