문서번호	설비부-5147
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		유병기	04/30 박기형
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』 원심펌프(관급) 감액변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  04.

도시기반시설본부

설비부

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

원심펌프(관급) 감액변경 검토 보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 감리단이 제출한 관급자재 원심펌프의 감액변경 보고 사항에 대한 검토 보고임.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

○ 공사규모 : 분뇨처리시설 4,000㎥/일, 기존시설 철거 및 상부공원화

○ 사 업 비 : 금73,200백만원(도급비 63,516백만원)

○ 공사기간 : ‘12.11.15 ~ ’16.06.30

○ 감리/시공사 : (주)도화엔지니어링 외1 / 대림산업(주) 외2

2		관급자재(펌프) 구매현황

○ 관급자재 계약현황                                       (단위 : 원)

계약번호	품명	수량	계약일	계약자	계약금액			납품기한
					소계	물품대	수수료
12142296000	원심펌프	1식	14.12.11	한국펌프공업협동조합	58,589,570	58,000,000	589,570	2015.6.30

<구매 상세내용>

구분	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	상등수 이송펌프-1	편흡입볼류트펌프 50A×1.6㎥/min×25m	대	2
2	상등수 이송펌프-2	편흡입볼류트펌프 150A×1.6㎥/min×40m	대	3
3	재이용수 이송펌프	편흡입볼류트펌프 150A×2.7㎥/min×10m	대	2	감액대상
4	바닥배수펌프	무폐쇄 수중펌프 80A×0.3㎥/min×20m	대	2
5	바닥배수펌프	무폐쇄 수중펌프 80A×0.3㎥/min×20m	대	2
6	바닥배수펌프	편흡입볼류트펌프 80A×0.3㎥/min×20m	대	2
	소계		대	13

○ 보고내용

- 신설 분뇨처리시설에 공급되는 잡용수는 제1처리장 급수동에 펌프를 설치         하여 2,3계열 사이 배관을 설치 재이용수조로 공급토록 설계 되었으나,

서남물재생센터 현대화사업으로 1,2계열 철거로 배관설치가 불가능.

- ㈜서남환경과 협의결과 제1처리장 5계열 공동구내 기존 잡용수배관에서        분기하여 공급토록 협의되어 관급자재로 구매된 재이용수 펌프가 불필요함.

○ 조달청 협의

- 조달청 담당자 협의결과 당초 구매의뢰한 조달물품요구서에 감액수량 및 금액을            표기하여 나라장터에 감액요청하면 조달청에서 입찰시 조사단가를 확인하여            계약자와 협의후 감액조치함.

(조달청 담당자 : 정하경 070-4056-8769)

3		보고자 의견

◦ ㈜서남환경과 협의한 결과와 같이 기존의 1처리장 5계열 공동구내 기존        잡용수 배관에 연결하여 재이용수조로 공급 가능하므로,

◦ 관급자재로 기 구매된 재이용수 공급펌프 2대(편흡입볼류트펌프 150A×2.7        ㎥/min×10m)에 대하여 조달청에 우선 감액변경 요청토록하고,

◦ 잡용수 이송배관 등 관로변경 사항은 추후 상세내용에 대하여 실정보고 받아

승인후 처리코져 합니다

붙임 : 1. 상등수 이송펌프 구매건에 대한 감액요청 1부.

2. 책임감리단 협의요청 공문 1부.

3. 서남환경 협의회신 공문 1부. 끝.