함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『뚝도 고도정수처리시설 2단계 공사 추진』 대체급수 관련 급수운영 추진 계획 통보

1. 배수과-2743호(2015.4.27.)와 관련입니다.

2. 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 추진을 위한 대현산 송수관로【구의 월계관로(용마ⓟ) ⇒ 뚝도 대현산배수지】의 통수추진 계획을 통보하오니 하오니 관련부서에서는 적극협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 대현산 송수관로 단계별 통수추진 계획

○ ①단계 : 월계배수지 수계전환	5.6(수)

- 당초 구의 → 변경 강북

○ ②단계 : 용마배수지 수계전환	5.6(수)~5.8(금)

- 당초 : 용마ⓟ → 용마배수지, 아차산ⓟ → 아차산배수지

- 변경 : 용마ⓟ → 가동중단, 아차산ⓟ → 아차산배수지+용마배수지

○ ③단계 : 대현산배수지 수계전환 추진	일정별도통보

- 당초 뚝도 → 변경 구의

※ 대현산 송수관로 세척 정상수질 확보 후 3단계 추진.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,고도정수반장,중부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	04/30 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-2817	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개