문서번호	급수운영과-8366
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	중부수도사업소장
김상웅	이병운	이승철	04/30 설동을
협 조
	시설관리과장		나태산
	시설관리팀장		채재일
	주무관		이훈재

노후 송배수관 연차별 추진계획 수립

2015. 4. 30

중부수도사업소

급 수 운 영 과

노후 송배수관 연차별 추진계획 수립

안전하고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위해  노후 송배수관 정비사업을 체계적으로 추진하고자 연차별 정비계획을 수립하여 시행에 만전을 기하고자 함니다.

Ⅰ				추진 개요

○ 근거 : 노후 송배수관정비사업 정비계획 작성 제출

배수과 - 1886(2015.3.24)

○ 노후 송배수관 정비 대상

- 400mm 이상 회주철관(CIP관)

- 1991년 이전 부설한 콜타르에나멜 내부 코팅 강관 및 도복장관(SP관)

○ 연차별 정비 목표(본부)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년이후	비고
계	61	4.0	4.0	3.0	51
CIP관(km)	3.2	1.2	1.0	1.0	-	2018년 완료
SP관(km)	57.8	2.8	3.0	2.0	51
예산(백만원)	23,500	8,000	8,000	7,500

○ 정비계획 수립 방법

- 노후 송배수관 중블록별 GIS시스템 자료 추출(2015년 1월 기준)

- 본부 급수수계 변경 등 향후계획을 반영

- 포장도로 굴착가능 지역 도로관리청 확인

- 정비 우선순위

・부설년도가 오래된 관로

・누수 및 녹물출수 등 민원사항 반영

・과년도 공사 완료 구간의 연장구간 반영

Ⅱ				추진계획 수립

○ 연도별 추진 계획

구분	노후관	정비 계획					정비 제외
		합계	2016년	2017년	2018년	2019년이후
합계(m)	61,001	53,020	4,329	4,548	3,691	40,452	7,981
CIP관(m)	3,228	1,704	593	194	917	-	1,524
SP관(m)	57,773	50,316	3,736	4,354	2,774	40,452	6,457

- 400mm 이상 회주철관(CIP관)은 2018년까지 완료

- 정비대상 제외 : 7,981m

・2015년 공사중인 구간, 재개발 지역 및 GIS 자료 수정

※ 2015년 송배수관 정비사업(3건)

・D=400~800mm L=3,100m  예산 : 5,100백만원

○ 구별 추진 계획

중블록명	노후관(m)	2016년	2017년	2018년	2019년이후	정비제외	비고
합계	61,001	4,329	4,548	3,691	40,452	7,981
중구	22,995	1,324	1,710	194	14,679	5,088	2015년 공사중
용산구	11,154	1,263	-	1,403	11,473	-2,985	GIS 수정
종로구	8,679	700	990	1,354	990	4,645	재개발 지역 2015년 공사중
성북구	15,923	1,042	1,848	740	13,310	-1,015	2015년 공사중 재개발 지역

○ 중블록별 추진 계획

중블록명	노후관(m)	2016년	2017년	2018년	2019년이후	정비제외	비고
합계	61,001	4,329	4,548	3,691	40,452	7,981
만리1	898	898	-	-	-	-
남산2	2,420	-	540	-	1,408	472	2015년공사중
남산3	11,290	426	125	-	5,134	3,356	2015년공사중
대현산2-1	7,290	-	1,045	190	6,055	-
대현산2-2	3,346	-	-	4	2,082	1,260	2015년공사중
대현산3	6,298	-	-	163	6,134	-
대현산4-1	4,544	876	-	1,240	3,163	736	GIS 수정
보광가1	312	386	-	-	2,176	2,249	GIS 수정
만리2	-	-	-	-	-	-
남산1	2,046	-	-	-	260	1,786	돈의문1재개발
대현산1-1	1,469	700	-	-	700	69	2015년공사중
대현산1-2	4,608	-	990	1,250	30	2,338	2015년공사중
대현산1-3	452	-	-	-	-	452	2015년공사중
대현산5	104	-	-	104	-	-
북악1	177	-	177	-	-	-
북악2	1,296	356	-	-	875	66	2015년공사중
북악3	3,472	-	1,671	48	3,425	-1,671	GIS 수정
북악 가-1	691	-	-	691	-	-
월곡	10,288	687	-	-	9,011	590	장위뉴타운
낙산	-	-	-	-	-	-

Ⅲ				행정 사항

○ 연차별 정비계획 본부(배수과) 보고

○ 노후 송배수관에 대한 지속적인 모니터링 시행

○ 정비계획을 반영하여 연차별 정비 시행

붙임 : 1. 노후관 현황 및 정비계획 1부.

2. 중블록별 정비계획서 1부.

2. 중블록별 정비계획서 도면(별첨) 1부.  끝.