문서번호	토목부-8932
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
장기철		서관석	04/30 노우성
협조
	주무관		오열상

북단IC L형옹벽 등 설계누락분 반영 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2015. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

북단IC L형옹벽 등 설계누락분 반영 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

공사현황

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2015. 8.22.

❍ 공 사 비 : 176,826백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 관련근거 : 월드컵감리 2015-174호(2015. 4.24.)

❍ 월드컵대교 북단IC 옹벽공사 중 보강토상단 L형옹벽 구조물(철근, 레미콘, 거푸집)과 보강토옹벽 뒷채움 잡석의 내용이 설계도서간 서로 상이하여

❍ 원설계사 의견조회 결과 L형옹벽 구조물과 보강토옹벽 뒷채움 잡석이 내역서에 누락된 것으로 회신됨에 따라 이에 대한 반영이 필요함.

❍ 설계 반영여부

구 분	연장	구조계산서	철근상세도	수량산출서	도급내역서	비 고
L형옹벽	376M	X	X	O	X	시공비누락 자재비반영
보강토옹벽 뒷채움잡석		-	-	O	X	시공비누락 자재비누락

❍ 위치도

월드컵대교 북단IC

#1:보강토옹벽 40m

#2:보강토옹벽 81.5m

#3:보강토옹벽 131.2m

#4:보강토옹벽 124m

❍ 설계현황

- 보강토상단 L형옹벽 구조물 누락

	① 구조계산서 누락 - 구조계산 결과 철근량 감소(21ton) ② 철근상세도 누락 ③ 내역서(시공비) 누락 ④ 관급자재비 반영

- 보강토옹벽 뒷채움 잡석 누락

	① 내역서(시공비) 누락 ② 관급자재비 누락 ③ 도면 및 수량산출서 반영

❍ 공사비 증·감 내역

(단위 : 천원)

구 분			규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비고
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
도급공사비	1.보강토옹벽		블럭식	㎡	968	254,400	968	254,400	-	-
	2.뒷채움공		뒷채움(SB-2)	㎥	-	-	688	16,888	688	16,888
			양질의 토사	㎥	204	400	-	-	-204	-400
	3.L형옹벽공		거푸집설치	㎡	-	-	1,541	42,640	1,541	42,640
			철근가공 및 조립	ton	-	-	28	13,944	28	13,944
			콘크리트 타설	㎥	-	-	557	8,628	557	8,628
	소 계					254,800		336,500		81,700
관 급 자 재 비		레미콘		㎥	564	32,763	564	32,763	-	-
		철 근		ton	49	37,636	28	21,715	-21	-15,921
		소 계				70,399		54,478		-15,921
총 공 사 비						325,199		390,978		65,779

감리단 검토의견

❍ 월드컵대교 건설공사 북단IC 옹벽공사 중 보강토 상단 L형옹벽 구조물과 보강토옹벽 뒷채움 잡석의 내역서 누락을 확인하였으며, 원설계사 검토의견을 반영하여 설계누락분을 추후 설계변경시 반영하는 것이 타당하다고 사료됨

조치계획

❍ 월드컵대교 북단IC L형옹벽 구조물 및 보강토옹벽 뒷채움 잡석 설계누락분에 대한 실정보고를 검토한 바, 감리단 검토의견이 타당하기에 우선 시공토록 업무지시하고 향후 설계변경하여 반영코자 함.

붙  임 : 감리단 공문 1부.  끝.