투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장
(경유)	남서울지역본부장
제목	도로굴착복구비 분담과 관련 문구 수정 요청에 대한 회신

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국전력공사 남서본(전력)-916호(2015. 4.15.) 및 토목부-8247호(2015. 4.22.) 및 남서본(전력)-992호(2015. 4.24.)와 관련입니다.

3. 위 호로 도로굴착복구비 분담과 관련 문구 재수정 요청하신 사항에  대하여 아래와 같이 검토결과를 통보하니 지중화공사를 조속히 재개하여 개봉동지역 주민의 숙원인 지중화사업이 조속히 완료될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 아  래

구 분	안 건	재수정 요청 사항	검토결과	비고
한전 단독 굴착구간	서울시 ↔ 한전과의 지중화사업 협약에 의한 복구비 분담(50:50)	도로굴착복구비는 도시기반시설 부담 요청	협약전 시도상(남부순환로) 한전관로 부설가능여부를 한전직원 입회하에 시험굴착을 하였고, 결과가 우리본부로 통보(남서본(공)62402-955<‘14.4.24.) 되어 배전관로는 시도상에 부설이 가능하다는 의견에 따라, 도로굴착복구는 “갑”이시행한다고 협약체결한 이후에, 현장여건상 일부 구간에서 시도상에 지장물 등으로 한전관로매설이 불가하여 이면도로로 굴착구간을 변경하여 발생된 사안이므로 이면도로상에 한전단독 굴착한 구간의 복구비는 50:50 분담하여야 함.

붙  임 : 관련공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이한규		광역도로과장	진재섭		토목부장	전결 04/30 노우성
협조자
시행	토목부-8908	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개