문서번호	건축부-4998
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		건축관리과장	건축부장
전재진		곽동호	전결 04/30 代강성욱
협 조
	주무관			김민호

「서울거리예술창작센터 조성공사」

준공정산 검토 보고

2015. 4.

도시기반시설본부

건 축 부

「서울거리예술창작센터 조성공사」

준공정산 검토 보고

『서울거리예술창작센터 조성공사』와 관련하여, 현장확인에 따른 공사 물량조정 등 준공정산 내용을 검토 보고.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울거리예술창작센터 조성공사

○ 위    치 : 광진구 광장동 17번지 일대(구의취수장)

○ 공사내용

- 제1, 2동 옥상방수 및 바닥, 천장 등 노후화 시설 개선공사

- 옥외 야외광장 조성공사 등

○ 공사기간 : `14.10.1 ～ `15.4.15

○ 도 급 액 : 1,523백만원

○ 시 공 사 : ㈜거산 대표 엄재룡

□ 추진경위

○ ‘14.09.25 : 공사계약

○ ‘14.10.01 : 공사착공

○ ‘15.04.15 : 준공계 제출

□ 준공정산 내용

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
계약금액	1,523,154,100	1,459,183,000	감)63,971,100	시설비

○ 준공정산 내역

(단위 : 원)

구분	주요변경내용	증·감액	비고
가설공사	콘크리트양생	- 15,958
철근콘크리트공사	레미콘, 철근, 거프집 등	9,709,012
목공사	카우보이도어(화장실) 및 합판깔기	654,036
방수공사	옥상방수	4,553,447
금속공사	장애인핸드레일 및 스틸핸드레일, 그레이팅 설치	3,644,135
미장공사	시멘트 페이스트 바름 등	2,135,112
창호공사	창호 및 커튼월, 현관캐노피 정산	- 12,214,398
도장공사	친환경비닐페인트, 스틸핸드레일 도장	- 508,199
수장공사	불연천장재 설치, 수성연질품칠 등	- 346,201
기타공사	유아용거치대 등	- 555,704
기타보수	호이스트크레인, 목공실 셔터 보수 등	1,615,038
가설전기		2,320,091
토목공사	물량정산 등	- 4,681,324
제경비 등	보험료, 이윤 등	- 37,485,045
합계		- 63,971,100

□ 검토 및 처리의견

○ 현장확인 및 공사물량 조정, 보험료, 이윤 등 정산사항에 대한 내역을 검토한 바, 적정하게 산출 반영 되었기에 정산처리코자 함.

붙 임  1. 준공정산 내역서 1부.
2. 제비율검증 1부. 끝.