문서번호	동물기획과-4591
보존기간	년
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	동물기획과장	동물원장		서울대공원장
김민수	김태원	노정래		06/12 안영노
협 조
	총무과장		이경로
	주무관		유미진
	전문관		김보숙
	주무관		김희준

해양관 보수공사에 따른

돌고래 사육 시설 임대 계약 계획

서울대공원

(동물기획과)

해양관 보수공사에 따른

돌고래 사육 시설 임대 계약 계획

해양관 보수, 보강 공사에 따른 돌고래 5수를 공사 기간 중 적절한 장소에서 사육코자 울산 남구 도시 관리 공단과 사육 시설 임대 계약을 체결하고자 함.

Ⅰ			추진배경

□ 서울특별시동물원관리규칙제5조(시설물 안전점검)

□ 공사일정

○ 2014.  3.  1 ~ 5. 12 : 에어돔 보수설계

○ 2014.  5. 13 : 공사시행계획 수립

○ 2014.  5. 15 : 에어돔 구매설치 발주

○ 2014.  5. 30 : 해양관 보수·보강공사 발주

○ 2014.  6.  1 : 착수(에어돔 및 철골트러스 보수)

○ 2014.  6. 19 : 돌고래 5수 울산 장생포고래박물관으로 이동

○ 2014.  6. 20 : 착공(해양관 보수·보강공사)

○ 2014.  9. 20 : 보수·보강공사 완료

○ 2014.  9. 30 : 돌고래 5수 서울대공원 해양관으로 원상 이동

Ⅱ			추 진 내 용

○ 근    거 : 출장 결과보고(동물기획과-4206, 2014.05.27.)

○ 내   용 : ‘14.05.13 출장 결과 울산 장생포 고래 체험관 보조 풀장이 돌고래 5수 사육 시설로 적합하다고 판단

○ 소 재 지 : 울산광역시 남구 고래로 244

○ 면    적 : 996.46m2(보조풀장 903.16m2)

○ 시    설 : 보조풀 전체(보조풀, 사료조리실, 사료냉동고, 사무실, 샤워실, 화장실)

○ 임대 조건 : 울산 남구 도시관리공단에 임대료 및 사용료 지급을 조건으로 돌고래 사육 시설 임대

○ 임대 기간 : 104일(공사 일정에 따라 연장 및 단축될 수 있음)

○ 지급 항목 : 임대료, 보험료, 전기료, 염소비용, 청소비용 지급

○ 임대 금액 : 금34,482,350원/104일

※ 울산 남구도시관리공단 외부 의뢰 산정 금액(붙임3)

○ 지급방법

1) 임대료 : 6월 일정산, 7~9월 월정산

2) 보험료, 전기료, 염소비용, 청소비용 : 고지서 근거 실비 별도 지급

▶ 예산과목 : 서울대공원, 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영, 동물 관리프로그램 운영, 재료비

※ 해수비용 재계약 후 잔여금 사용

○ 관리주체 : 돌고래 사육 관리는 서울대공원 직원이 직접 관리

※ 직원 출장 일정 별도 수립

○ 먹이비용 : 돌고래 5수 먹이 비용 서울대공원 자체 조달

※ 실제 서울대공원 돌고래 사육비용

- 서울대공원 해수구입 단가 8,008원/t X 50t/일 = 400,400원/일

- 400,400원/일 X 30일 = 12,012,000원/월

- 월 서울대공원 전기사용료 6,500천원/월

- 월 소요비용 18,512,500원/월

- 총 소요비용 69,113,330원/112일

Ⅲ			계약방법 및 소요예산

□ 시설 임대 기관

○ 기 관 명 : 울산 남구 도시관리공단

○ 주    소 : 울산 남구 달삼로 48번길 11

○ 연 락 처 : 052-226-0932(계약담당 : 안영태)

○ 계약기간 : 104일(기간 변동에 따라 계약금 변동 가능)

○ 계약방법 : 수의계약

※ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

○ 계약조건 : 붙임 참조

○ 예산과목 : 서울대공원, 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영, 동물 관리프로그램 운영, 재료비

○ 소요예산 : 금34,482,350원(사용기간 104일 기준 임대 사용 금액)

※ 염소사용료, 청소비용, 전기료, 보험료 등은 고지서 근거 실비 별도 지급

○ 지급방법 : 월별 청구에 따른 지급 방식

Ⅳ			향후계획

○ 돌고래 시설 임대 계약 체결(총무과)

○ 돌고래 이동 계획 별도 수립(동물기획과)

○ 돌고래 이동 계획에 따른 이동 준비(동물기획과)

붙임  1. 고래생태체험관 보조풀장 사용허가 계약서 1부.

2. 울산 장생포고래생태체험관 출장 결과 보고 1부.

3. 시설물 감정평가서 1부.  끝.