문서번호	도로보수과-634
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종		국중진	02/16 이종엽
협조

설계변경 검토보고(4회,최종)

【2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

성동도로사업소

(도로보수과)

·

설계변경 검토보고(제4회,최종)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)』 시행 중 도로굴착기관의 관리청복구의뢰 물량 정산 및 관급자재 수량 정산 등으로   설계변경(최종)사항을 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 2. 28

○ 착  공  일 : 2014. 3. 28

○ 준공예정일 : 2015. 2. 28

○ 도  급  자 : 한린토건  이현숙

○ 총 공 사 비 : 2,554,000,000원(도급비 1,679,051,000, 관급비 874,511,000,

이전비 438,000)

○ 공사개요

- 소규모포장(10㎡)기준    : 178.84a

- 아스콘포장(t=5cm, 기계) : 367.04a

- 기타부대공             : 1식

□ 변경 사유

○ 공종별 시공물량 정산 및 제경비 정산에 따른 변경

○ 관급자재 수량 정산에 따른 변경

□ 설계변경 내역

○ 물량변경

공 종	규 격	단위	변경수량		증,감	비고
			당초	변경
소규모포장복구	10㎡이하	a	0.38	0.38	-
	10㎡이상	a	177.46	177.29	감)0.17
절삭후덧씌우기	5a/일	a	30.24	32.75	증)2.51
	10a/일	a	36.01	36.01	-
	20a/일	a	134.29	134.29	-
	50a/일	a	159.15	159.15	-
	배수성포장	a	7.35	7.35	-

○ 공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	2,554,000,000	2,471,003,180	감)82,996,820
도급비	1,679,051,000	1,652,079,000	감)26,972,000
관급비	874,511,000	818,924,180	감)55,586,820
이설비	438,000	0	감)438,000

□ 예산과목

○ 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사,

시설비 및 부대비(401), 시설비(01)

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공종별 시공물량 정산 및 관급자재 수량 정산 등 변경사항을         반영하여 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

붙임 :1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증결과 1부. 끝.