투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(도로과장)
(경유)
제목	도로점용(굴착,복구)허가 기간 연장 요청

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 허가증 : 강동구-2014-기타-00023호 관련입니다.

3. 구리암사대교 연결도로 건설공사 중 고덕동 317-1~고덕동 470간 도로 확장 공사와 관련하여 도로점용(굴착·복구)기간 연기 신청을 아래와 같이 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

기 간		변 경 사 유
당 초	변 경
2014. 9.26.~ 2015. 3.31.	2014. 9.26.~ 2015. 9.30.	동절기 굴착통제 및 교통규제 심의 변경으로 인한 공사기간 연장

붙임 : 도로점용(굴착복구)허가증 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	박상철		광역도로과장	진재섭		토목부장	03/11 노우성
협조자
시행	토목부-4936	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개