보    고    서

등록번호	시설관리과-11947

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김철수	채재일	05/01 나태산

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2015. 04. 30

복 명 자 : 지방시설주사보  김철수

공사현황

❍ 공 사 명 : 2014 평창동 등 8개동 상수도공사

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
******	********	********** *******	**********	도로공사(경찰서)신고 미승인으로 공사가능시 까지 연기
******	*********	********** *******	**********	폐전가옥 공가 및 장애물 적치로 공사가능시 까지 연기

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 현장의 공사지연으로 공사 가능시까지 급수공사 작업연기 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.