“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	보건복지부장관(자립지원과장)
(경유)
제목	노숙인시설 기능보강사업관련 국고보조금 집행세부내역 변경신청

2015년 우리시 여성노숙인시설인 영보자애원의 기능보강사업 추진과 관련, 국고보조금을 아래와 같이 변경집행하고자 하니 승인하여 주시기 바랍니다.

O 건    명 : 영보자애원 기능보강사업비 세부내역 변경집행 요청

O 변경사유 : 2015 숙소개보수공사 예산 부족분(216,792천원) 충당을 위해 의료용 침대구입 예산 일부를 공사비로 변경집행

(단위:천원)

구분	세부내역	변경 전	변경 후	증감	변경사유
	계	1,573,208	1,573,208	0
영보 자애원 기능보강 사업	숙소 개보수	1,283,208	1,500,000	216,792	○ 숙소개보수 신청액 1,575,530천원중 1,283,208천원 (△292,322천원)만 편성되어 공사진행에 어려움발생. ○ 숙소개보수 추가비용은 낙찰하한율 87.745% 적용, 1,500,000천원으로 216,792천원 부족. ○ 이를 위해 의료용 침대구입예산 290,000천원중 일부를 숙소개보수 공사비로 변경집행하고 침대 부족분은 차기년도 이후로 구입을 연기하고자 함.
	의료용 침대구매	290,000	73,208	-216,792

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이계원		여성복지팀장	이현숙		여성정책과장	05/04 박종수
협조자
시행	여성정책담당관-7978	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 9층	/
전화	02-2133-5135	/전송	02-2133-0729	/	seoulyouth@seoul.go.kr	/	부분공개(5)