문서번호	녹지관리과-1896
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김대수	진동엽	최병언	03/03 배호영
협 조

“한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사” 실정보고사항 검토결과보고

2014. 03.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

“한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사” 실정보고사항 검토결과보고

『한양도성 순성길(남산·낙산)조성공사』시행중, 공사감독 위탁기관인 서울특별시 시설관리공단이 요청한 『실정검토 내용 제출』(공사감독3처-1569호, 2014.2.27.)에 대하여 검토하고, 아래와 같이 보고합니다.

▢ 공사 개요

가. 공 사 명 : 한양도성 순성길(남산, 낙산) 조성공사

나. 도 급 액 : 금434,766,800원

다. 발 주 처 : 중부공원녹지사업소 녹지관리과

라. 공사기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 05. 24

마. 도 급 자 : (주)그룹이십일 대표 이용훈

바. 공사내용

- 철거 및 제거공사 : 가림막 등 21종 철거, 단풍나무 등 28종 390주 제거

- 식재공사 : 할미꽃 등  7종 77,120주(본)

- 시설물공사 : 데크계단 등 7종

▢ 보고내용 및 조치계획

가. 서울시시설관리공단에서 요청한 실정사항 검토내용

구 분	현황 및 검토의견(공단)	검토 의견(우리사업소)	비 고
남산 N타워 ~ 캠프모스	▶남산체육회 시설물을 철거하고 산책로를 조성키로 된 기 설계 구간의 콘크리트 기초 및 지장물 철거 미반영(콘크리트 및 혼합폐기물)되어 폐기물 처리 추가반영 - 쉘터기초(T75)철거 : 0식 → 1식 - 지장물 철거 : 0식 → 1식	▶남산체육회 시설물 철거토록 되어 있으나 내역에 미반영된 콘크리트 및 혼합폐기물의 폐기물처리 추가반영 - 쉘터기초(T75)철거 : 0식→1식 - 지장물 철거 : 0식 → 1식	붙임사진 1,2,3,4,
	▶배드민턴장을 철거하고 산책로를 조성키로 된 구간 기초하부 기단 미반영되어 기초하부기단을 존치하고 산책로 선형 변경시공	▶순성길로 조성 계획된 기존 기초하부 기단은 폐기물 처리에 미반영되어 물량이 많아 많은 예산이 소요될 뿐만 아니라 급경사지로 산책로 조성에 적절하지 않아 한양도성쪽으로 산책로 선형 변경시공	붙임사진 5

구 분	현황 및 검토의견(공단)	검토 의견(우리사업소)	비 고
남산 N타워 ~ 캠프모스	▶관목식재지에 기존 잡목뿌리 및 잡초들로 초화류 식재가 어려움이 있어 식재지 면정리 후 초화류 식재 - 식재면 조성 : 0㎡ → 2,493㎡	▶초화류식재 계획된 지역에 기존 잡목뿌리가 있어 초화류 식재시 어려움이 있을 뿐만아니라 식재 후 고사 우려가 많아 식재지 면정리 후 초화류 식재 - 식재면 조성 : 0㎡ → 2,493㎡
	▶현장과 설계도서간 수목제거/전정/이식물량 상이하여 현장여건에 맞게 수목제거/전정/이식물량 조정 - 수목제거 소나무(R18) : 9주 → 10주 소나무(R22) : 6주 → 5주 소나무(R28) : 1주 → 0주 단풍나무(R16) : 3주 → 2주 아까시아나무(R52) : 1주 → 0주 아까시아나무(R56) : 1주 → 0주 아까시아나무(R58) : 1주 → 0주 관목제거(H2.0m) : 4430.2㎡→4397.7㎡ - 수목전정 소나무(B10~19) : 64주 → 61주 소나무(B20~29) : 43주 → 42주 - 수목이식 소나무(R16) : 0주 → 1주 잣나무(R16) : 0주 → 1주 단풍나무(R8) : 0주 → 1주 철쭉(이식) : 0주 → 130주	▶현장과 내역서간 수목제거/전정/이식물량 상이(수목불량 및 양호)하여 현장여건에 맞게 수목제거/전정/이식물량 조정 - 수목제거 소나무(R18) : 9주 → 10주 소나무(R22) : 6주 → 5주 소나무(R28) : 1주 → 0주 단풍나무(R16) : 3주 → 2주 아까시아나무(R52) : 1주 → 0주 아까시아나무(R56) : 1주 → 0주 아까시아나무(R58) : 1주 → 0주 관목제거(H2.0m) : 4430.2㎡→4397.7㎡ - 수목전정 소나무(B10~19) : 64주 → 61주 소나무(B20~29) : 43주 → 42주 - 수목이식 소나무(R16) : 0주 → 1주 잣나무(R16) : 0주 → 1주 단풍나무(R8) : 0주 → 1주 철쭉(이식) : 0주 → 130주
낙산	▶현장과 설계도서간 수목제거/전정/이식물량 상이 하여 현장여건에 맞게 물량 조정 - 수목제거 가중나무(R16) : 1주 → 0주 가중나무(R30) : 1주 → 0주 가중나무(R36) : 1주 → 0주 감나무(R30) : 1주 → 0주 대추나무(R6) : 1주 → 0주 대추나무(R16) : 1주 → 0주 복숭아나무(R16) : 2주 → 0주 은행나무(R28) : 3주 → 1주 은행나무(R34) : 5주 → 4주 - 수목전정 은행나무(B20~29) : 0주 → 3주 - 수목이식 소나무(R18) : 0주 → 5주 대추나무(R8) : 0주 → 1주 대추나무(R16) : 0주 → 1주 복숭아나무(R16) : 0주 → 2주	▶현장과 내역서간 수목제거/전정/이식물량 상이(수목양호.불량 및 대상지 벗어남) 하여 현장여건에 맞게 물량 조정 - 수목제거 가중나무(R16) : 1주 → 0주 가중나무(R30) : 1주 → 0주 가중나무(R36) : 1주 → 0주 감나무(R30) : 1주 → 0주 대추나무(R6) : 1주 → 0주 대추나무(R16) : 1주 → 0주 복숭아나무(R16) : 2주 → 0주 은행나무(R28) : 3주 → 1주 은행나무(R34) : 5주 → 4주 - 수목전정 은행나무(B20~29) : 0주 → 3주 - 수목이식 소나무(R18) : 0주 → 5주 대추나무(R8) : 0주 → 1주 대추나무(R16) : 0주 → 1주 복숭아나무(R16) : 0주 → 2주	붙임사진 6

나. 중부공원녹지사업소 추가 설계변경 요청사항

구 분	현황 및 문제점	설계변경 요청사항	비 고
남산 N타워 ~ 캠프모스	▶순성길 구간중 마사토 포장(0.8M) 계획되어 있는 구간은 조성 후 산책로 파손 및 물고임 등 유지관리에 어려움이 있을 뿐만아니라 전체 산책로 구간중 당 구간만 마사토 포장 계획되어 있어 전체적으로 어울리지 않음	▶ 유지관리 및 전체적으로 어울릴수 있도록 마사토포장 구간을 흙포장으로 조성
	▶ 순성길 마지막 부분(캠프모스)은 마지막 안내판 및 안내시설이 없음	순성길 종점인 캠프모스 부분의 순성길 종점 안내판과 순성길을 마지막으로 둘러보고 쉴수있는쉼터(통나무 의자 등)를 조성

다. 개략공사비

구 분	금 액 (원)			비 고
	당 초	변 경	증 감
도 급 비	434,766,800	443,005,000	8,238,200
공급가액	395,242,546	402,731,819	7,489,273
부 가 세	39,524,254	40,273,181	748,927

▢ 보고자 의견

❍ 상기 실정 검토사항에 대한 변경된 내용은 선 시공, 후 설계변경하고자 함

❍ 설계변경시 예산 증가가 발생시 예산 잔액을 활용하고자 함.

첨부 : 현황사진 1부.  끝.