투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수방기간 공사추진에 따른 업무협조 요청

1. 우리시(본부)에서 도시계획사업으로 시행하는 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 관련입니다.

2. 위 공사를 2016년 5월 민자사업 구간과 동시 개통을 위해서는 민자구간 본선 고가교와 접속되는 8공구 시점부(과천시 관내) 양재대로상의 고가교 및 주암교 등을 조기에 완료하여야 하나 과천시 구간의 도시관리계획 및 보상지연으로 당초 계획보다 공정이 많이 지연되어 있는 실정입니다.

3. 따라서 그간의 지연공정을 만회하기 위하여 부득이 양재천에 건설되는 주암교 설치공사를 치수관리에 문제가 없는 범위내에서 수방기간동안(2015. 5. ~2015. 6.)에도 시행하고자 따로붙임과 같이 시공계획을 수립하고 협의하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 수방기간 중 주암교 시공계획 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(하천관리과장),서초구청장(물관리과장)
주무관	김구		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	05/06 노우성
협조자	주무관	유근평
시행	토목부-9289	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개