문서번호	시설관리과-9056
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
강희창	05/06 송근호
협 조

급수공사 연기보고(서초동 1617-2, 신설-131)

명에 의거 서초1동외 10개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 요지 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	당초공사기간	연기사유	비고
신설-131	서초동 1617-2	신규 D=40mm	2015.04.23.~ 2015.04.28	현장 지반 미 마무리 및 계량기실 자리 건축자재 적치로 건축주측에서 연기요청

3. 보고내용 : 현장 지반 미 마무리 및 계량기실 자리 건축자재 적치로 공사 연기 요청

4. 보고자 처리 의견 : 상기 보고내용처럼 건축주측 요청으로 본 건 급수공사를 연기 처리코자 합니다.

가. 연기내용

- 당초 :  2015.04.23. ~ 2015.04.28.

- 변경 :  2015.04.23. ~ 2015.05.31.

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 공사 연기원 1부(별도 첨부).  끝.