문서번호	기전설비2과-1260
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
권혁제		신용철	05/07 차광재
협조
	주무관		박중모

-‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

합동점검 결과 지적사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.  .

한강사업본부 기전설비 2과

-‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

합동점검 결과 지적사항 조치계획 보고

본부, 시설공단, 시공사 합동점검 지적사항에 대하여 위탁감독기관인 시설공단의 검토의견을 제출받아 조치계획을 보고 드림.

현황 및 추진경위

□ 공 사 개 요

- 공 사 명 :‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사

- 공사내용 :  풀 바닥 타일설치 3,198㎡, 풀 바닥 및 벽체 도장 24,000㎡ 등

- 공사기간 :‘15. 3. 13 ~‘15. 10. 1.  (시공사 :  ㈜ 평광건설 )

- 도 급 비 :  1,607,638천원

- 공 정 률 :  39%

□ 추 진 경 위

-‘15. 4.  9 : 공사현장 합동점검 (본부, 시설공단, 시공사)

-‘15. 4. 14 : 점검결과 통보 및 처리방안 검토 지시 (시설공단)

-‘15. 4. 29 : 뚝섬수영장 사워장 및 탈의실 바닥 정비요청 (공원기획과-1257호)

-‘15. 5.   4 : 공사 실정보고 제출 (시설공단 공사감독1처-3863호)

실정보고 내용

□ 현장점검 지적사항 검토의견

위 치	지 적 사 항	검 토 의 견	비고
뚝 섬	∘ 성인풀 벽체 판석 탈락	∘ 성인풀 판석 전 구간 (179.8㎡) 재 설치	판석 재활용 90%
	∘ 샤워장 및 탈의실 바닥 정비	∘ 이용자 안전 위해 전 구간 판석 마감 (565.3㎡)	판석 조달 구매
	∘ 유수풀 주변 등 블록 평탄화	∘ 기 계약된 작업인원으로 정비
잠 실	∘ 그늘막 파손부 정비	∘ 기 계약된 작업인원으로 정비
잠 원	∘ 매표소 입구 휀스 재 설치	∘ 관급자재 추가 구매(50경간) 설치	출입문 및 이동형 휀스 설치 포함
	∘ 여과기 주변 휀스 설치
여의도	∘ 바닥재 도포구간 바닥 균열	∘ 균열폭 0.5mm 이상 (325m) 균열보수 필요
	∘ 배수구 구체콘크리트 보수	∘ 기 계약된 작업인원으로 정비
망 원	∘ 매표소 앞 배수구 및 뚜껑 정비	∘ 기 계약된 작업인원으로 정비

□ 소요 예산

구 분		단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	추가 보수공	천원	-	68,756	68,756	제경비 율 ≒ 62.7%
	제 경 비		-	43,083	43,083
	소 계		-	111,839	111,839
관급비	화 강 판 석		-	22,816	22,816	조달수수료(0.54%) 포함
	메 쉬 휀 스		-	4,424	4,424
	소 계		-	27,240	27,240
합 계			-	139,079	139,079

- 단가적용 : 신규공종인 판석철거 및 설치, 균열보수는 시설공단에서 산출된

단가에 낙찰율(86.747%) 적용

- 추가되는 자재(화강판석 및 메쉬휀스)는 관급 구매

조 치 계 획

□ 소요예산은 금년도 미 추산 사업예산(125백만원)과 정산대상 보험료

(35백만원) 사용

- 기계약된 건강, 연금, 노인요양, 퇴직공제 보험료는 실공사 기간이 3개월로 정산 대상임

□ 시민이 안전하고 편안하게 수영장을 이용할 수 있도록 시설공단 검토 의견과 같이, 추가 보수는 야외수영장 보수공사에 포함하여 시행

- 단가 및 수량은 향후 시설공단의 설계변경위원회 심의결과를 반영하여  설계변경 시행

첨 부 : 개략 공사비 내역서 1부.   끝.