투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 변경계약 내용 통보(서남권야구장 건립공사)

1. 서야책감 2015-100(2015.04.17.)호 및 서야책감 2015-124(2015.05.06)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 서남권야구장 건립공사의 하도급 변경계약   사항을 통보하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 내용

하도급 공사명	하도급 업체명	하도급 금액(원)	하도급 기간		하도급율 (%)	변경사유
			변경전	변경후
골조공사	두송건설(주)	14,459,819,550	‘10.04.30 ~‘15.02.28	‘10.04.30 ~‘15.06.30	124.95	공기연장
지붕 철골공사	㈜삼진철구	23,828,684,000	‘11.08.16 ~‘14.06.30	‘11.08.16 ~‘15.06.30	107.87	공기연장
지붕 막공사	㈜타이가	4,229,915,800	‘11.11.08 ~‘15.02.28	‘11.11.08 ~‘15.06.30	83.03	공기연장
사이포닉 공사	유원엔지니어링(주)	370,948,600	‘12.05.16 ~‘15.02.28	‘12.05.16 ~‘15.06.30	90.30	공기연장
방수공사	제인건설(주)	749,327,700	‘10.07.14 ~‘15.02.28	‘10.07.14 ~‘15.06.30	83.07	공기연장
수장공사	㈜스페이스체인지	1,591,991,500	‘12.07.30 ~‘15.02.28	‘12.07.30 ~‘15.06.30	106.32	공기연장
코킹공사	㈜건설코킹	131,307,000	‘12.11.05 ~‘15.02.28	‘12.11.05 ~‘15.06.30	167.29	공기연장
타일공사	㈜원산건설	161,354,080	‘12.10.15 ~‘15.02.28	‘12.10.15 ~‘15.06.30	97.38	공기연장
도장공사	㈜아남공영	492,517,300	‘14.07.16 ~‘15.02.28	‘14.07.16 ~‘15.06.30	84.33	공기연장
조적공사	㈜대몽건설	164,978,589	‘15.01.03 ~‘15.02.28	‘15.01.03 ~‘15.06.30	88.12	공기연장
압출성형 시멘트 판넬공사	㈜스페이스체인지	453,067,120	‘14.12.29 ~‘15.02.28	‘14.12.29 ~‘15.06.30	94.27	공기연장
수영장 공사	㈜서강제니스	111,639,462	‘14.12.26 ~‘15.02.28	‘14.12.26 ~‘15.06.30	83.37	공기연장
석공사	제이드(주)	466,477,718	‘15.01.20 ~‘15.02.28	‘15.01.20 ~‘15.06.30	125.41	공기연장
지붕판넬 공사	한림정공(주)	8,290,227,000	‘14.05.14 ~‘15.02.28	‘14.05.14 ~‘15.06.30	112.23	공기연장

따로붙임  1. 하도급 변경 계약검토 보고 공문(책임감리단) 1부.

2. 하도급 변경 계약 수정사항 보고 공문(책임감리단) 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김대식		건축총괄과장	강성욱		건축부장	05/07 代강성욱
협조자	주무관	윤용훈
시행	건축부-5249	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2609	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(6)