문서번호	조경과-6689
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		조윤래	05/07 이원영
협조

- 가로정원 조성사업 -

사업 변경 요청건 검토보고

2015. 5.

푸른도시국

(조경과)

- 가로정원 조성사업 -

사업 변경 요청 건 검토보고

강남구청으로 부터 ‘2015년 가로정원 조성사업’ 의 대상지, 규모, 사업비 등의 변경 요청이 있어 검토하고 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위치/규모 : 압구청로(청담사거리~캘러리아백화점)/ 850m

○ 사업기간 : 2015. 1.~2015. 11.

○ 사 업 비 : 금300백만원

○ 사업내용 : 가로정원 조성사업

□ 변경 요청사항

(단위 : 백만원)

구 분	위 치	규 모	사업비	사업내용	변경사유
당 초	압구정로	850m	300	가로정원 조성	가로정원 조성대상지의 규모 증가
변 경	압구정로	1,300m	350	가로정원 조성

□ 검토결과

○ 당초 압구정로의 청담사거리~갤러리아백화점의 편도 구간을 사업대상지로 하였으나, 같은 노선의 맞은 편 구간을 사업대상지로 포함하여 규모(물량)를 증 변경한 것으로 가로정원으로써 대상지와 사업내용으로 적합함

□ 보고자 의견

○ 2015년 압구정로 가로정원 조성사업의 규모(물량)와 사업비, 사업내용 변경을 요청한 것으로 가로정원으로써 대상지와 사업내용으로 적합하므로,

○ 당초 사업비인 300백만원에 가로정원 사업비의 유보금 48백만원을 증액하여 사업을 시행토록 하고자 함.

붙임 : 관련 요청 문서 1부.  끝.