투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 포장복구 변경안 통보

1. 방재시설부-6120(2015.5.8.)호와 관련입니다.

2. 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 시점부~공대철도건널목구간 포장복구공사 변경안 통보하니 변경되는 공사내역 검토하여 설계변경 시 반영될 수 있도록 실정보고 하여 주시기 바랍니다.

※ 포장복구 변경안(시점부~ 공대철도건널목)

구 분	변 경 안	비 고
A구간	· 당 초 : 칼라아스콘(암적색) 덧씌우기 전면포장 · 변 경 : 측구공사로 인해 훼손된 포장면 복구
B구간	· 당 초 : 측구공사로 인해 훼손된 포장면 복구 도깨비시장 전후 100m 일반아스콘 덧씌우기 전면포장 · 변 경 : 측구공사로 인해 훼손된 포장면 복구 후 도로 종·횡단면 고려하여 전구간 일반아스콘 덧씌우기 전면포장

붙임 : 포장복구공사 변경 방침서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	05/08 임춘근
협조자
시행	방재시설부-6162	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개