문서번호	도시철도설비부-4719
결재일자	2015.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
권상운		서태창	05/08 정찬웅
협조

우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)

상주감리원(전기분야) 변경 및 투입 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도설비부

우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)

상주감리원(전기분야) 변경 및 투입 검토보고

우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역 전기분야 상주   보조감리원 변경승인 요청에 대한 검토 결과를 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울시 우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)

○ 계약기간 : 2009.01.07 ~ 2017.01.31

○ 계 약 자 : ㈜동일기술공사 외 4개사 [전기분야 : (주)협우지여엔지니어링]

○ 계약금액 : 4,174백만원(6차 진행중)

□ 관련법규 및 관련문서

○ 관련법규

- 건설기술 진흥법 시행규칙 : 제35조(건설사업관리기술자의 배치기준 등)

건설사업관리용역업자는 발주청에 제출한 배치계획에 따라 건설사업관리기술자를 배치하여야 한다. 다만, 배치계획과 다르게 건설사업관리기술자를 배치하려는 때에는 미리 발주청의 승인을 받아 배치계획상의 건설사업관리기술자와 등급·경력·실적 및 교육·훈련 등의 점수가 같은 수준 이상인 건설사업관리기술자를 배치하여야 한다.

○ 관련문서

- 전기 상주감리원 투입 요청(도철설비부-4062, `15.4.20)

- 상주 건설사업관리기술자(전기분야)변경 승인요청(동일(철도감) 제15-1175호))

□ 상주 보조감리원 변경투입 검토

○ 변경사유

- 본 용역 계약후 장기간(약 6년) 경과로, 당초 투입예정 감리원은 부득이 타          공사 현장에 배치되어 등급·경력·실적 등이 평가점수 이상인 감리원으로           교체 투입하여 원활한 감리업무를 수행코자 함.

○ 변경내용 검토결과 : 적격

구 분		평가기준	상주 보조감리원		검 토 결 과
			당 초	변 경
성 명		-	김한균	김창수	-
생 년 월 일		-	1955.11.**	1954.01.**	-
기술자격		고 급	특 급	고 급	적 격
경력사항	해당분야/분야외 (점수:6점)	6년 이상	해당분야 : 5.9년 분야외 : 15.5년 (6점)	해당분야 : 21.5년 분야외 :2.5년 (6점)	적 격
	직무분야 (점수:9점)	5년 이상	8.6년 (9점)	18년 (9점)	적 격
교육이수 (점수:1점)		2주	2주 (1점)	2주 (1점)	적 격

□ 종합 검토의견

○ 상주 보조감리원의 변경요청에 대한 검토

- 건설기술 진흥법 시행규칙 및 입찰안내서(제8조, 계약상대자의 근로자)상의          조건을 충족하고,

- 변경 배치대상 감리원(김창수)은 등급·경력·실적·교육이수 평가 점수가 당초       투입 예정인 감리원(김한균)과 동등 이상 이며,

- 해당분야 및 직무분야 경력 사항이 우수함에 따라 변경승인 요청 내용과 같이       승인하고, 변경 예정인 상주 감리원을‘15. 5. 11일부터 투입코자 함.

○ 감리 대가의 지급(안) 검토

- 동일(철도감) 제15-1175(`15.5.7)호와 관련, ㈜동일기술공사, ㈜ 협우지여엔지

니어링에서 공기 연장에 따른 대안으로,

- 감리대가의 지급을 당초 고급(12 개월)에서 중급(13.6 개월)으로 변경하는(안)을        요청함에 따라 감리단의 의견을 수용하여 원활한 감리업무 수행.

□ 행정사항

○ 변경사항 승인(통보) : 도시철도사업부, ㈜동일기술공사, 우이신설 경전철(주).  끝.