문서번호	급수운영과-10134
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박용석		유명은	05/08 조면행
협조
	주무관		이일로

철개고정장치 현장조사에 대한 처리 보고

2015. 05.

강서수도사업소

(급수운영과)

철개 고정장치 시공실태 조사 보고

원형 밸브실 철개 고정장치 누락시공등에 대한 감사지적이 있어 최근 3년간 시공실태를 전수조사하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련 근거

○ 누수방지과-1140(2015.2.10.) :「철개 고정장치 시공실태 전수 조사계획」

○ 급수운영과-2122(2015.2.16.) :「철개 고정장치 시공실태 조사계획」

Ⅱ		조사 내용

○ 조사대상 : 신월동36-1~203-44호간 송배수관 정비공사외 5건

○ 조 사 자 : 사업소 지역담당과 감독기관(서울시시설관리공단,이준엔지니어링) 합동점검

※ 관련 시공업체 조사참여 및 입회실시

○ 조사기간 : 2015. 2. 25 ~ 4.30

○ 조사방법

- 준공사진등으로 확인이 가능한 대상은 서면조사 실시(1차작업)

- 당초 설계대로 시공 및 정산여부 확인

․ 고정장치(사각)으로 시공하고 높이조절용(원형)으로 정산한 경우: 환수대상

․ 고정장치(사각)으로 시공, 정산한 경우: 증빙자료(준공사진등)확인

․ 고정장치(사각)시공분은 현장확인이 불가하므로 철개 밀림상태등을 확인하여 이상없을시 적정시공으로 간주

- 서류로 확인이 어려운 대상은 현장조사 실시(2차작업)

- 철개 미시공 여부 확인

․ 높이조절용(원형)으로 시공 및 정산한 경우 : 변실내 설치상태 육안확인

․ 고정장치(사각)으로 시공 및 정산한 경우 : 철개 밀림상태등 확인

○ 조사내역 : 첨부물등 참조                                 (단위 : 천원)

시행연도	공 사 명	공사 구분	조사대상	조사결과		조치계획			환수내역
				적정	부적정 (철개밀림발생등)	환수	재시공 여부		개소	금액
							필요	불필요
계			29	29	0				0	0
2012	신월1-4지구 재개발 상수도관 이설공사	원인자이설	1	1
2012	신월동 가로공원길 지하주차장 건설공사중 상수도관 이설공사	원인자이설	1	1
2012	화곡1배수분구 하수관거 정비공사	원인자이설	1	1
2013	신월동 36-1~203-44호간 송배수관 정비공사	송배수관	14	14
2014	신월1-4지구도로개설구간 상수도관 이설공사	원인자 이설	8	8
2014	신월빗물저류배수시설구간내 상수도관 이설공사	원인자 이설	4	4

Ⅲ		조치계획

○ 위와 같이 양천구 신월동지역의 송배수관 정비공사, 원인자이설공사에 대한 조사결과 송배수관 정비공사의 철개고정장치는 적정 시공(공단감독 및 사업소담당 합동확인)되어 있으며, 원인자 이설공사에 대한 현장조사시 철개밀림이 없고 현장 시공상태가 양호하여 재시공은 불필요하여

○ 2012년~ 2014년간 상수도 공사에 대한 환수 및 재시공 대상은 없으며, 향후에도 감사지적사항이 발생치 않도록 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 원형밸브실 설치현황 조사서(2012년~2014년) 각 1부.  끝.