문서번호	도로보수과-1714
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박상구		김효식	03/03 이규상
협조
	주무관		윤신식

증미산 보강공사 준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

강서도로사업소

도로보수과

증미산 보강공사 공사기한 연기 검토 보고

동절기 기온강하로 인해 중지한 증미산 보강공사의 기한 연기를 검토하고 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 공사 개요

○ 공  사  명: 증미산 도로사면 보강공사

○ 공사기간: 2013.12.23.~2013.03.22

○ 규     모: 락볼트공 262공 및 면정리 등(도급액 231백만원)

○ 도 급  자: ㈜동아기업 김수홍

□ 동절기 공사 중지

○ ‘13.12.26: 공사 중단 지시(도로보수과-11841, 13.12.26)

- 동절기 품질관리 미흡 우려

○ ‘14.02.15: 공사 재개 지시(도로보수과-1065, 14.02.15)

Ⅱ		기한연기 검토

□ 공사 중지 일수 산정

○‘13.12.26 ~ ’14.02.15 간: 52일

□ 준공 연기 기한 검토

○당초 기한 2013.03.22일로부터 중지기간 52일 적용 연기

Ⅲ		조치의견

□ 준공기한 연기 시행

○ 당초: 2013.03.22

○ 변경: 2014.04.12. 끝.