문서번호	교량보수과-1357
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량보수과장	서부도로사업소장
정상모	구현모	03/03 김만수

설계도면 작성용역 시행계획

(두모교 보수공사)

2014. 3

서부도로사업소

(교량보수과)

두모교 보수공사 설계도면 작성용역 시행계획

"두모교 보수공사"의 공사발주전 계약심사 이행 및 사업수행에 필요한

설계도서 제작을 위해 설계도면 작성용역을 시행하고자 함

1	관 련 근 거

□ 2014년도 기술용역 자체시행 설계도면 작성비용 지원계획

※ 기술심사담당관-106호 (2014. 1. 6)

□ 2014년 교량보수공사 시행계획 (교량보수과-374호, 2014. 1.20)

2	두모교 보수공사 개요

□ 사업구간 : 용산구 서빙고동 ~ 성동구 금호동 구간

□ 공사개요

○ 교면 재포장(방수) : 135 a

○ 콘크리트 단면보수 ; 4,488 m2

- 콘크리트방호벽 및 연석, 동부간선램프 및 B램프 콘크리트 박리, 박락구간

□ 사 업 비 : 2,550백만원 (관급자재비 포함)

□ 추진사항 : 보수공사 자체 설계

3	도면제작용역 시행

□ 과업 내용

○ 교량 보수공사 발주전 계약심사 및 보수공사에 필요한 설계도면 제작 및

설계내역서, 수량산출서, 단가산출서, 공사시방서 인쇄 및 제본 (총7세트)

□ 참여업체자격 및 계약자 선정

○ 엔지니어링산업진흥법 제21조, 동법시행령 제3조의 규정에 의거 건설부분의 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 업체 또는 건설산업기본법 제8조 및 동법 시행령 제7조에 의한 전문건설업중 "시설물유지관리업" 등록업체

○ 주된 영업소가 서울, 경기지역에 소재한 업체 중 과업수행에 적합한 업체로부터 복수 견적을 받아 그 중 최저가를 제출한 업체를 선정

※ 기술심사과 지침 : 발주부서별 “1인 견적 수의계약”의 방법으로 시행 가능

(각 분야별 2천만원 미만시 1인 견적 소액 수의계약 체결 가능)

□ 도면 제작업체 복수견적 결과

업 체 명		업 체 A 웅원건설(주)	업 체 B 엠와이산업개발(주)	업 체 C 아낌산업(주)	기술심사담당관 기준 단가
견적 단가	도로분야 (난이도 최저)	30,000원/장당 (인쇄, 제본비 포함)	33,000원/장당 (인쇄, 제본비 포함)	34,000원/장당 (인쇄, 제본비 포함)	95,830원/장당 (난이도 단순)
견적 금액 (부가세포함)		4,950,000원	5,445,000원	5,610,000원
자격 요건		적 합	적 합	적 합
선정 업체		● <최저가 견적 제출>
업체 소재지		서울시 용산구 보광동 274-17	양천구 목동 중앙 서로 11길 49-19	강남구개포로28길32,301(개포동,대연빌딩)

4	조 치 계 획

□ 설계도서 작성비용에 대해 최저가 견적을 제출한 A업체와 수의 계약

하여 공사발주, 시행에 필요한 설계도서 일체를 납품받아 상기 교량

보수공사를 발주하고자 함

5	향 후 일 정

□ 두모교 보수공사의 설계도면, 내역서, 공사시방서, 단가·수량산출서 납품

○ 설계도서 납품 : 계약일로부터 30일 (계약심사과 제출용 1세트는 5일 이내)

□ 향후 추진일정

○ 2014. 3. 7(금) : 계약심사과 심사요청 (원가관리시스템 입력 및 심사의뢰)

- 설계도서 1세트(도면, 시방서, 단산,수량산출서) 계약심사과 직접 송부

○ 2014. 3.10(월) ~ 3.14(금) : 계약심사 진행 (개략 5 ~ 6일 소요)

○ 2014. 3.17(월) ~ 3.19(수) : 계약심사지적 설계보완 및 시행품의(발주)

○ 2014. 3.21(금) ~ 3.28(금) : 조달청(나라장터) 입찰공고문 게시(재무과)

따로붙임 : 1) 도면제작용역 발주설계서

2) 도면작성비 산출기초조사서

3) 설계도면제작비 견적서 (복수 견적)

4) 기술심사담당관 관련공문.   끝.