함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	고도정수반장
(경유)
제 목	변경계약체결통보[구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사]

1. 시설안전부 고도정수반-2640(2015.05.06)호와 관련입니다.

2. 『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고 통보 합니다.

가. 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

나. 계약자 :*********************2

다. 공사개요 : *************************************

라. 공사기간

- 총  차  분 : ’09.11.23.∼’15.04.20

- 6차분(금차) : ’14.01.08.∼’15.04.20

마. 변경내역 : 계약금액 감액(총차분, 6차분)

(단위:천원)

구분	당초		변경		비고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총차분	‘09.11.23∼’15.04.20	179,112,632	변경없음	179,098,632	계약금액 감액 감) 14,000
6차분	‘14.01.08∼’15.04.20	51,652,719	변경없음	51,638,719	계약금액 감액 감) 14,000

바. 변경사유

- 준공식비용 변경(2015.5.13 준공식 행사축소로 인한 비용 감액)

사. 변경에 따른 조치사항

- 계약금액 감액으로 계약보증서 및 도시철도공채 추가징구 해당없음

붙임 : 1. 공사변경계약체결통보서 등 각1부.    끝.

	재무회계과장
주무관	한희균		재무회계과장	05/08 조두업
협조자
시행	재무회계과-5871	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/	hhk011@seoul.go.kr	/	부분공개(7)