결산검사위원 요구 자료 제출

시 행	총무과-15014	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.5.9.
보존기간	년
공개여부	대시민공개
수 신 자	재무과장

주무관	서무팀장	총무과장	행정국장		결재
최정은	진용득	이혜경	05/09 김의승
협 조

제 목	결산검사위원 요구자료 제출(요구번호 2015-90 조상호 위원)

따로붙임 : 조상호 위원 요구자료 1부.  끝.

조상호 위원

○ 요구번호 : 2015-90

○ 요구내용

46. 2014년 시청사 건축시설물(유지보수공사 연간단가계약) 관련 계약서 및
변경계약서, 변경 차수별 계약서간 신구 비교표, 방침, 실정보고서, 계약변경 사유

47. 2014년 청사전기설비유지공사(연간단가계약) 관련 계약서 및 변경계약서,
변경 차수별 계약서간 신구 비교표, 방침, 실정보고서, 계약변경 사유

48. 2014년 시청사 기계설비유지보수공사(연간단가계약) 관련 계약서 및 변경계약서,
변경 차수별 계약서간 신구 비교표, 방침, 실정보고서, 계약변경 사유

□ 2014 회계연도 결산검사위원(조상호 위원) 요구자료를 아래와 같이
제출합니다.

1. 관련 계약서 및 변경계약서, 방침(실정보고서) : 따로붙임 1,2,3

2. 변경차수별 계약서간 신구 비교표

(단위 : 천원)

요구번호	건 명	당초 금액	차수별 변경 금액
			1차	2차	3차	4차
46	2014년 시청사 건축시설물유지보수공사 (연간단가계약)	263,897	312,035	645,721	643,333	-
47	2014년 시청사 전기설비유지보수공사 (연간단가계약)	174,362	187,110	247,104	326,898	325,000
48	2014년 시청사 기계설비유지보수공사 (연간단가계약)	177,282	207,261	277,261	317,261	310,000

3. 계약변경 사유

- 을지로청사 그레벵 박물관 유치 및 민선6기 조직개편에 따른 사무공간
확충으로 인한 임차청사 사무실 재배치 긴급 공사의 시공물량 증가 등

따로붙임 : 1.시청사 건축시설물(유지보수공사 연간단가계약) 관련 계약서, 변경계약서 등 각 1부.

2. 시청사 청사전기설비유지공사(연간단가계약) 관련 계약서 및 변경계약서 등 각 1부.

3. 시청사 기계설비유지보수공사(연간단가계약) 관련 계약서 및 변경계약서 등 각 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (총무과)	담당사무관	최석기
	☎2133-5647 2133-5651 2133-5654	담당자	이승준 이관호 채충일
	작 성 일 : 2015. 5. 8(금)

이곳에 본문을 입력하세요