문서번호	급수운영과-8201
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	북부수도사업소장
최용진	代이승완	05/11 문윤기
협 조
	시설관리과장		이계환
	기전팀장		김충완

2015년 북부수도사업소 관내 배수지

항 청소 계획

2015. 5.

2015년 배수지 항 청소 계획

시민고객에게 맑고 깨끗한 아리수를 공급하기 위하여 2015년

상·하반기 배수지의 항 청소 계획을 수립 시행코자 함.

※ 관련근거

❍ 수도법시행규칙 제22조 2(일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치)

❍ 수도법시행규칙 제22조 3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등 위생조치 등) 〔배수지 항 청소는 6개월마다 1회 이상 시행〕

배수지 현황

청소대상 : 8개소

- 공릉배수지(170,000톤) : 1지, 2지, 3지, 4지, 5지, 6지

- 월계배수지(100,000톤) : 1지, 2지, 3지, 4지

- 번동소배수지(2,000톤), 4.19배수지(2,000톤), 우이배수지(2,000톤),   수유5배수지(1,200톤), 수유6배수지(3,000톤), 상계2배수지(1,400톤)

배수지 항 청소 연간단가계약 현황

용 역 명 : 2015년 북부수도사업소 관내 배수지 항 청소 용역(단가계약)

계 약 일 : 2015. 04. 20

착 공 일 : 2015. 04. 22

준공기한 : 2015. 11. 30

도 급 액 : 266,364,230원

도 급 자 : 주마건설(주)  대표 신경기

배수지 항 청소 계획

청소기간 : 2014. 5.18 ~ 6. 16(상반기)

2014. 10.1 ~ 11. 12(하반기)

항 청소 추진 사항

상반기 항 청소는 소독세정제 사용, 하반기는 물청소를 사용하여 청결 유지

항 출입전실에 대한 청소를 배수지 청소에 포함하여 시행

배수지 항 청소시 병행하여 정기점검 시행

- 배수지의 기능과 안전을 유지하기 위하여 항 청소일정에 맞추어 정기점검 실시 - 점검표<붙임2>

- 배수지별 점검반 지정하여 정기점검 실시 <붙임3)

추진기간

청소기간 : 2015. 5. 18 ~ 6. 16 - 일정별 청소일정 참조<붙임1>

점검기간 : 2015. 5. 18 ~ 6. 16

정비기간 : 2015. 5. 18 ~ 6. 16

향후 계획

경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가업체에 작업지시하여 즉시 보수조치

예산이 수반되는 경우 본부로 예산요청하여 추진

점검결과 및 지적사항 처리결과는 전․후 사진을 첨부하여 본부에 보고

따로붙임 : 1. 항 청소 일정표 1부.

2. 시설물 정기점검 실시결과(양식) 1부.

3. 점검반 편성내역 1부.  끝

【붙임 1】          청 소 일 정(2015년 상반기)

월/일	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간	작업준비	공릉대배수지(153kg) (1지23,000㎥)		공릉대배수지(153kg) (2지23,000㎥)		공릉대배수지(191kg) (3지31,000㎥)
월/일	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간		공릉대배수지(191kg) (4지31,000㎥) (안전진단)		공릉대배수지(191kg) (5지31,000㎥) (안전진단)		공릉대배수지(191kg) (6지31,000㎥) (안전진단)
월/일	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간		4.19배수지 (2,000㎥) 11kg (안전진단)	우이배수지 (2,000㎥) 11kg (안전진단)	수유5배수지 (1,200㎥) 11kg (안전진단)	수유6배수지 (3,000㎥) 17kg (안전진단)	번동배수지 (2,000㎥) 26kg (안전진단)	상계2배수지 (1,400㎥) (8.5kg)
월/일	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간		월계대배수지 184kg (1지25,000㎥)		월계대배수지 184kg (2지25,000㎥)		월계대배수지 184kg (3지25,000㎥)

월/일	6/14	6/15	6/16
요일	일	월	화
배수지별청소시간		월계대배수지 184kg (4지25,000㎥)

【붙임 2】

시설물 정기점검 실시결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

시설물명		관리부서
준공년월일	년 월 일	점검년월일	년 월 일
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
구 조 물	ᄋ배수지 구조물 누수 여부 ᄋ항 내․외부 균열 및 파손상태 - 벽체, 기둥, 바닥, 슬라브 등 ᄋ항 내부 구조물 박리, 박락 상태 ᄋ항 내부 바닥, 기둥, 슬라브 등의 홈타이 부분 철근노출 여부 ᄋ항 내부 방수상태
배관 및 밸브류상태	ᄋ항 내부 배관부식 및 녹 발생 여부 - 유입관, 유출관, 퇴수관, 월류관등 ᄋ항 내부 각종 밸브류 부식 및 작동상태 - 제수밸브 및 퇴수밸브 등 ᄋ관랑내 배관 및 밸브류 부식 등 녹 발생 여부 ᄋ강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	ᄋ구조물내로 내․외수 유입 여부 ᄋ자동 배수펌프 작동여부 ᄋ우수 배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	ᄋ배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴 여부 ᄋ옹벽 및 축대 균열 파손 여부 등
항 청소 실시상태	ᄋ항 청소에 필요한 인원 및 장비보유 적정 여부 ᄋ항 내부 청소전 바닥의 토사 등 퇴적상태 ᄋ항 청소 실시상태 등
기 타	ᄋ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

담당	팀 장	과 장	결재 일자	점검자	시설 급 성명 (인)
					시설 급 성명 (인)
	전결
					시설 급 성명 (인)
					시설 급 성명 (인)
					시설 급 성명 (인)

점 검 사 진

시설물명 :

사진설명		사진설명
사진설명		사진설명
사진설명		사진설명

※ 배수지 외부,내부 성․절토사면, 안전휀스, 밸브실 내부 사진 첨부

【붙임 3】

배수지 점검반 지정내역

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 배수지 현황

- 점검 대상 : 배수지 8개소 (지역배수지 : 2개소 , 1차배수지 : 6개소)

2. 배수지 점검반 현황

연번	배수지	위 치	용 량 (m3)	시설 점검반 지정	비 고
1	공 릉	노원구 공릉동 산222-1	170,000	급수운영과 (지역담당)	김종필
2	월 계	노원구 월계4동 산63-1	100,000	급수운영과 (지역담당)	유강현
3	상계2	노원구 상계4동 산161-2	1,400	급수운영과 (지역담당)	정기성
4	번동소	강북구 미아3동 산25-23	2,000	시설관리과 (지역담당)	황승섭
5	4.19	강북구 수유4동 산73-3	2,000	시설관리과 (지역담당)	황승섭
6	우이	강북구 수유4동 산25-1	2,000	시설관리과 (지역담당)	연제관
7	수유1	강북구 수유5동 산127-1	1,200	시설관리과 (지역담당)	황승섭
8	수유6	강북구 수유6동 산84-5	3,000	시설관리과 (지역담당)	황승섭