문서번호	급수운영과-10174
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
주은선		유명은	05/11 조면행
협조
	주무관		이일로

철개고정장치 현장조사에 대한 처리 보고

2015. 05.

철개 고정장치 시공실태 조사 보고

원형 밸브실 철개 고정장치 누락시공등에 대한 감사지적이 있어 최근 3년간 시공실태를 전수조사하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련 근거

○ 누수방지과-1140(2015.2.10.) :「철개 고정장치 시공실태 전수 조사계획」

○ 급수운영과-2122(2015.2.16.) :「철개 고정장치 시공실태 조사계획」

Ⅱ		조사 내용

○ 조사대상 : 신정4동 876번지외 3개소 세척갱생관정비공사외 4건

○ 조 사 자 : 사업소 지역담당과 감독기관(서울시시설관리공단,이준엔지니어링) 합동점검

※ 관련 시공업체 조사참여 및 입회실시

○ 조사기간 : 2015. 2. 25 ~ 4.30

○ 조사방법

- 준공사진등으로 확인이 가능한 대상은 서면조사 실시(1차작업)

- 당초 설계대로 시공 및 정산여부 확인

․ 고정장치(사각)으로 시공하고 높이조절용(원형)으로 정산한 경우: 환수대상

․ 고정장치(사각)으로 시공, 정산한 경우: 증빙자료(준공사진등)확인

․ 고정장치(사각)시공분은 현장확인이 불가하므로 철개 밀림상태등을 확인하여 이상없을시 적정시공으로 간주

- 서류로 확인이 어려운 대상은 현장조사 실시(2차작업)

- 철개 미시공 여부 확인

․ 높이조절용(원형)으로 시공 및 정산한 경우 : 변실내 설치상태 육안확인

․ 고정장치(사각)으로 시공 및 정산한 경우 : 철개 밀림상태등 확인

○ 조사내역 : 첨부물등 참조                                 (단위 : 천원)

시행연도	공 사 명	공사 구분	조사대상	조사결과		조치계획			환수내역
				적정	부적정 (철개밀림발생등)	환수	재시공 여부		개소	금액
							필요	불필요
계			30	28	0	2			2	566
2012	신정4동 876번지외 3개소 세척갱생관 정비공사	배급수관	10	9		1			1	347
2013	신정7동 201번지외 1개소 세척갱생관 정비공사	배급수관	3	2		1			1	219
2014	14신정제4구역재개발철거폐쇄접수분소화전이설	원인자이설	12	12
2014	신정네거리역 1출구 승강편의시설 설치공사 관련 상수관 이설공사	원인자이설	1	1
2014	서부트럭터미널 지하차도 건설공사 구간	원인자 이설	4	4

Ⅲ		조치계획

○ 위와 같이 양천구 신정동지역의 배급수관 정비공사, 원인자이설공사에 대한 조사결과 철개고정장치 부적정 시공 2개소(2012년 신정4동 876번지외 3개소 세척갱생관 정비공사[(주)고황 정두범], 2013년 신정7동 201번지외 1개소 세척갱생관 정비공사[태아건설 이선호])에 대하여 환수조치를 시행하여 향후 이러한 사례가 발생치 않토록 공사에 만적을 기하고자 함.

붙임 : 원형밸브실 설치현황 조사서(2012년~2014년) 각 1부.  끝.