문서번호	녹지관리과-1962
결재일자	2015.5.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
최수영		문경재	05/11 장상규
협조

『2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사』

설계변경(정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

한강사업본부

(녹지관리과)

『2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사』

설계변경(정산) 검토보고

우리본부에서 시행중인 “2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사”와 관련하여  현장여건 변화에 따른 설계변경사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

공사현황

공 사 명 : 2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사

위    치 : 이촌 서빙고어린이놀이터외 3개소

공사내용 : 파고라 1, 원형벤치 1, 평의자 8, 진자시소 1, 고무칩 440㎡, 투수블럭포장 70㎡, 경계석 20m, 모래소독 및 충진 1,138㎡, 노후시설물 철거

공사기간 : 2015. 4. 22 ~ 2015. 5. 11

도 급 액 : 금12,903천원(관급자재비 37,380천원 별도)

도 급 자 : ㈜명조원 대표 박양수

실정보고 및 검토의견

위치	공종	실정보고 내용	검토의견
뚝섬 벽천놀이터	철거 (노후시설물 철거)	당초 고장 및 파손으로 철거대상이었던 에너지현황판이 최근 운동놀이시설물 보수완료로 작동이 됨	에너지현황판 존치

※ 현황사진

당초(`14 ~`15.3)	현재(`15. 5)
현황판에 숫자가 표시되지 않음	현황판에 숫자 표시되며, 운동기구 작동시 계기판에 반영되고 있음

설계변경 내용

공종	주요 설계변경내용	비 고
철거공	○ 에너지현황판 존치로 인한 공사 철거물량 변동 ․ 터파기(인력10%+기계90%) 1.11㎥ → 0.143㎥ ․ 무근콘크리트깨기(백호0.7㎥) 0.385㎥ → 0.081㎥ ․ 폐기물상차(백호0.7㎥) 0.504㎥ → 0.081㎥ ․ 고재처리 195.682kg → 0kg	현장여건 반영

변경금액                                                   (단위 : 원)

구 분		금 액		증 감	비 고
		당 초	변 경
총 공 사 비		50,283,000	50,232,000	감 51,000
도급비	공 급 가 액	11,730,000	11,683,637	감46,363
	부가가치세	1,173,000	1,168,363	감4,637
	계	12,903,000	12,852,000	감 51,000
관급자재비		37,380,000	37,380,000

검토의견

현장여건 반영에 따른 물량 변경 및 보험료 정산에 대한 설계변경 사항으로 별첨 변경설계서와 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

붙임 : 1) 설계변경내역서 1부.

2) 제비율 검증결과 1부. 끝.