투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사 설계변경 시행

1. 녹지관리과-1962(2015.5.11.)호 ‘2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사 설계변경(정산) 검토보고’와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 ‘2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사’ 시행과 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 한강공원 어린이놀이터 정비공사

나. 위    치 : 이촌 서빙고어린이놀이터외 3개소

다. 사업개요 : 파고라 1, 원형벤치 1, 평의자 8, 진자시소 1, 고무칩 440㎡, 투수블럭포장 70㎡, 경계석 20m, 모래소독 및 충진 1,138㎡, 노후시설물 철거

라. 공사기간 : 2015. 4. 22 ~ 2015. 5. 11

마. 계약금액                                               (단위 : 원)

구 분		금 액		증 감	비 고
		당 초	변 경
총 공 사 비		50,283,000	50,232,000	감 51,000
도급비	공 급 가 액	11,730,000	11,683,637	감 46,363
	부가가치세	1,173,000	1,168,363	감 4,637
	계	12,903,000	12,852,000	감 51,000
관급자재비		37,380,000	37,380,000

바. 도 급 자 : ㈜명조원 대표 박양수

사. 설계변경사유 : 현장여건 반영에 따른 물량 변경 및 보험료 정산 등 반영

아. 예산과목 : 한강공원관리및운영, 한강공원시설물관리및개선, 한강공원이용시설 보수·정비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증결과 1부. 끝.

주무관	최수영		녹지관리과장	문경재		공원부장	05/11 장상규
협조자	주무관	심옥경		총무과장	최대봉
시행	녹지관리과-1991	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0849	/전송	02-3780-0745	/	csy0119@seoul.go.kr	/	부분공개