건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(마포석유비축기지 재생 및 공원화사업 관련 사전재해영향성검토용역)

1. 공원조성과-6035(2015.5.11.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진 중인 “마포석유비축기지 재생 및 공원화사업 관련 사전재해영향성검토 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 마포석유비축기지 재생 및 공원화사업 관련 사전재해영향성검토 용역

나. 용역기간 : ‘14.11.12. ~ ’15.5.11.

다. 계약금액 : 금삼천삼백오십오만원정(￦33,550,000원정)

라. 업 체 명 : 사단법인 한국건설안전협회 대표 안무영

마. 준공기한 연기

- 당 초 : ‘14.11.12 ~ ’15.5.11.

- 변 경 : ‘14.11.12 ~ ’15.6.30.

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울시 공원조성과

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한연기 검토보고 및 합의각서 등 관련문서 각 1부.  끝.

	공원조성과장
주무관	가덕윤		생활공원팀장	유영봉		공원조성과장	05/11 오순환
협조자
시행	공원조성과-6047	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울특별시 중구 무교로 21, 9층 공원조성과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2071	/전송	02-2133-1081	/		/	부분공개