문서번호	시설과-3396
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		이종한	05/11 이용태
협 조
	주무관			남상국

남산공원 남측 둘레길 조성사업 실시설계용역 준공기한 연기 검토보고

2015. 5.

중부공원녹지사업소

시설과

남산공원 남측 둘레길 조성사업 실시설계용역

준공기한 연기 검토보고

남산공원 남측 둘레길 조성사업 실시설계용역과 관련하여 설계방향 재검토 및 다양한 의견수렴을 위해 기한을 연장하고자 검토 보고드림.

□ 용 역 개 요

○ 용 역 명 : 남산공원 남측 둘레길 조성사업 실시설계용역

○ 용역기간 : 2015. 3. 26 ~ 5. 14

○ 도 급 액 : 19,357,630원

○ 도 급 자 : ㈜케이웍스디자인 대표 경종남

□ 준공기한 연기

○ 연기기간

- 당  초 : 2015. 3. 26 ~ 2015. 5. 14

- 변  경 : 2015. 3. 26 ~ 2015. 7. 31

○ 연기사유 : 남산공원 남측사면 일대의 소나무재선충 발생, 생태경관보전지역 보호 필요성 제기 등으로 숲길정비 기본방향 재설정을 위한 검토 및 다양한 의견수렴 소요기간 필요

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

○ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부: 준공기한연기의뢰서 1부.  끝