투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행- 도로옹벽(용산동2가) 정밀점검용역

우리사업소에서 시행중인 『도로옹벽(용산동2가) 정밀점검 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 도로옹벽(용산동2가) 정밀점검용역

2. 용역기간 : 2015. 03. 03 ~ 2015. 05. 11

3. 용 역 비 : 13,186,000원

4. 용 역 사 : (주) 청운구조안전연구원

5. 설계변경내역

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 용 역 비	13,186,000	13,036,000	감) 150,000
도 급 비	12,586,000	12,586,000	-
자문회의비	600,000	450,000	감) 150,000

6. 설계변경사유 : 자문회의 개최계획에 따른 자문위원 수당 변동

7. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로사면 붕괴예방을 위한 보수 보강, 시설비(401-01)

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 검토보고서 1부.

2. 변경설계 내역서 1부.  끝.

주무관	권세봉		도로보수과장	05/12 이규철
협조자	주무관	이상하		주무관	홍용현		관리단속과장	김영선
시행	도로보수과-4697	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개