문서번호	건축부-5445
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
정재흥		송종훈	05/12 代강성욱
협 조
	문화사업팀장			노명옥
	경리과장			허금도
	건축설비과장			김영수
	주무관			박춘복

-아동청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역- 준공기한 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05

도시기반시설본부

(건 축 부)

-아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역-

준공기한 연장 검토 보고

『아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역』에 대하여 기존 건축물의 구조보수 및 보강에 따른 자문 결과 반영 등에 따라 설계용역기간 연장 필요 여부를 검토하고 보고함.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역

○ 위    치 : 양천구 신월동 268-90번지 외 8필지

○ 건물규모 : 지하1층/지상1층, 연면적 1,190.17㎡

○ 건물용도 : 김포가압장⇒교육연구시설(교육원)

○ 설계공종 : 대수선 및 증축, 용도변경

○ 용역기간 : ‘14.12.18 ∼ ’15.05.16

○ 설 계 자 : ㈜디아건축사사무소(정현아), ㈜하나기연(김인선)

○ 용 역 비 : 금구천이백삼십만원(￦92,300,000원)

□ 추진경위

○ ‘14.07.22 : 아동․청소년 예술교육센터 조성․운영 계획(행정1부시장)

○ ‘14.07.23 : 설계 및 공사 발주의뢰(문화정책과)

○ ‘14.09.23 : 설계공모

○ ‘14.12.11 : 설계계약

○ ‘14.12.18 : 착수계 제출

○ ‘15.01월 ~ ’15.4월 : 운영자와 수차례 설계협의(서울문화재단)

○ ‘15.04.23 : 문화체육관광본부장 설계 진행사항 보고

○ ‘15.04.30 : 외부 전문가 자문회의 개최(보완 설계중)

□ 용역기간 연장검토

○ 용역기간 연장사유

- 기존 건축물의 구조 보수 및 보강에 대한 자문 결과 반영을 위하여 설계기간 연장이 필요함.(※자문결과:부분적으로 상세 설계하여 시공계획 반영 등)

○ 용역기간 변경내용(※금액변경 없음)

- 당초 : ‘14.12.18~’15.05.16

- 변경 : ‘14.12.18~’15.06.16 [증)31일]

○ 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 처리의견

- 용역기간 연장은 타당하다고 사료되며, 상기와 같이 용역기간 연장하여 계약변경코자 함

□ 향후 추진계획

○ ‘15.06 : 설계용역 완료

○ ‘15.08 : 공사 착공

○ ‘16.04 : 공사 준공.

붙 임 : 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.