투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	개통관련 업무 협의(방화대교 남단 접속도로 건설공사)

1. 우리본부에서 시행중인“방화대교 남단 접속도로 건설공사”와 관련하여 장기간 공사로 인한 지역주민들의 불편을 해소코자‘15. 6월말 진입부(올림픽대로→방화동) 및 9월초 진출부(방화동→올림픽대로) 1개차로씩 우선 개통코자 추진중에 있으나

2. 지난 2015. 5. 8. 강서지역 시의원 및 구의원, 지역주민에 대한 설명회시 아래와 같은 요구사항이 있어 협의하오니 검토후 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 주민 요구사항

- 광명∼서울간 고속도로건설과 관계없이 현재 건설된 치현터널내 양방향 3차로 개통 요청

붙 임 : 교통처리계획도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	05/12 노우성
협조자	주무관	박근우
시행	토목부-9787	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개