문서번호	도로보수과-2435
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
조경현		05/12 김승태
협 조
	주무관		한수영

공사내용 변경사항 검토보고

(2015년 노후포장도로 정비공사(B구역))

2015. 5

남부도로사업소

(도로보수과)

공사내용 변경사항 검토 보고

현재 시행중인 “2015년 노후포장도로 정비공사(B구역)”에 대해 노후포장 정비 두께 일부 조정에 대한 검토 보고임.

Ⅰ			공사개요

공 사 명 : 2015년 노후포장돌 정비공사(B구역)

공사기간 : 2015. 4. 8. ~ 2015.12.18

공사개요 : 절삭 및 덧씌우기 A=6개노선 8개 구간 777a

도 급 비 : 469백만원

도 급 자 : 금원씨앤씨(주)

Ⅱ			검토내용

관악로상에『봉현초등학교~은천길입구삼거리』의 포장공사는 1․2차로 표층(t=5cm), 3․4차로 표층및기층(t=12.5cm),『은천길입구삼거리~봉천천사거리』는 표층(t=5cm)을 절삭후 포장 예정이나

『봉현초등학교~은천길입구삼거리』구간 중 3차로의 포장상태를 확인결과 균열 깊이가 깊지 않아 표층(t=5cm) 정비로,

『은천길입구삼거리~봉천천사거리』구간의 4차선(버스전용차선) 중 하행은 포장상태가 양호하여 금번포장에서 제외, 상행구간은 버스의 하중으로 인해 포장상태가 불량하고 균열깊이가 깊어 표층및기층 정비로 변경하고

난곡길『호암로~관악휴먼시아1단지입구』구간의 노후포장 정비 두께를  현장 포장상태를 고려하여 (상․하행 t=10cm → 상행 t=5cm, 하행 t=10cm) 변경하는 것이 타당하다고 판단됨

Ⅲ			조치의견

상기 검토내용으로 포장공사를 시행하고 변경에 따른 물량 및 공사비 증․감사항은 추후 설계변경 시 반영

Ⅳ			행정사항

검토결과를 시공사 및 감리에 즉시 통보하여 원활한 공사추진

붙임 : 변경구간 위치도 1부.  끝.