투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(소)위원회 자문 의뢰(강남순환 8공구)

우리부에서 시행 중인 『강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사』에 대한 설계변경(소)위원회 자문을 아래와 같이 요청코자 합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

나. 규    모 : 폭 왕복 4∼10차로, 연장 : 7.96km

다. 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7.31.

라. 시 공 사 : 롯데건설(주)외 1

마. 감 리 사 : ㈜동명기술공단건축사사무소

2. 설계변경소위원회 자문요청 내용

가. 자문안건 : 본선고가교(BR2) 보완설계에 따른 강교 제작 등 수량 변경

나. 변경금액 : 증 299,000천원

붙임 : 설계변경 소위원회 자문 요청서  1부.  끝.

주무관	박웅교		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	05/12 노우성
협조자	주무관	유근평
시행	토목부-9780	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개